문서번호	시설관리과-23995
결재일자	2015.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
배형진	문용욱	이자원		11/10 이상래
협 조

통합감시제어센터 종합시운전 결과 보고

2015. 11. 10(화)

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

통합감시제어센터 종합시운전 결과 보고

우리 사업소 통합감시제어센터의 신규 감시시스템의 감시·제어 성능 등 종합 시운전을 시행하고 결과를 아래와 같이 보고드림.

관련근거

통합감시제어센터 이전 및 종합시운전 계획(시설관리과-21311, ‘15. 11. 9)

사업개요

건    명 : 중앙제어실 통합감시제어설비 제작구매 설치

위    치 : 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 청사 5층

계 약 일 : 2015. 6. 2.

계 약 자 : *************

계약금액 : 금498.479.390원(금사억구천팔백사십칠만구천삼백구십원)

납품기한 : 2015. 10. 30.

사업규모

- 통합 영상감시제어시스템 및 제어실 구축

- 우장산배수지 원격감시설비 설치 1식

그간 추진사항

‘15. 04. 01. : 본부 계약심사 의뢰

‘15. 04. 21. : 중앙제어실 통합감시제어설비 제작구매 설치 발주

‘15. 06. 02. : 계약업체 선정

‘15. 06. 29. : 제작도면 승인

‘15. 10. 15. ~ 10. 30. : 시운전

‘15. 10. 30. : 납품 완료

시운전 현황

시운전기간

- 단계별 시운전 : ‘15. 10. 15. ~ 10. 23.

- 종  합 시운전 : ‘15. 10. 24. ~ 10. 30.

시운전내용

- 계측기기 영점조정 및 유지관리

- 자동운전 프로그램 관리 및 통신 시험운전

- 운전방안 설정 및 정상동작 확인

- 시운전 체크리스트 작성

- 운영자 교육 및 합동시험 운전

제어센터 근무자 교육내용

- 운영관리 이론

- 조작방법, 설비구조 및 관리

- 프로그램 작성 및 수정

- 비상조치사항의 대처요령

- 유지보수

시운전 결과 : 이상없음

- 운전상태 정상 확인 및 근무자 교육 완료

※ 세부 시운전결과 및 유지관리 매뉴얼 붙임 참조

향후 계획

제어센터 이전에 따른 발생품 정리 및 물품관리전환 소요조회

납품 및 시운전이 완료되었으므로 물품검수하여 준공시행코자 함

붙임 1. 시운전 체크리스트 1부.

2. 시운전 완료보고서 1부.

3. 유지관리 매뉴얼 1부.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원(☎3146-3990) 기전팀장 : 문용욱(☎4015) 담당 : 배형진(☎4017)