문서번호	설비부-14052
결재일자	2015.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
박시현		유병기	11/11 代이달영
협조

『마곡지구내 재생수 공급시설 설치 전기공사』

건설폐기물 처리 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

도시기반시설본부

(설  비  부)

『마곡지구내 재생수 공급시설 설치 전기공사』

건설폐기물 처리 검토보고

우리 본부에서 시행하는 「마곡지구내 재생수 공급시설 설치 전기공사」와 관련 전기 옥외인입관로 설치시 발생한 건설폐기물(폐아스콘) 처리 실정보고에 대한 검토 결과를 보고 드림.

1		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 마곡지구내 재생수 공급시설 설치 전기공사

□ 사업기간 : 총차 ′12.04.20.~′16.07.31.(3차 ′14.11.10.~′16.01.30.)

□ 공사규모 : 시설용량 20,000톤/일, 변압기 750kVA 2대

□ 계약금액 : 총차 891,885천원(3차 644,006천원)

□ 계약업체 : ㈜통일전력, 지웅전설, ㈜주흥건영

2		관련근거

□ 도화(서남마곡)2015-118(2015.11.10.) 폐기물 처리 업체 선정 요청

3		실정보고 내용

□ 건설폐기물(폐아스콘) 발생

○ 서남물재생센터 전기실에서 마곡재생수 현장간 전기 인입관로공사로     폐아스콘 발생 [(1.0m×0.23m)×298m×2.35=161톤]

□ 전기공사 폐기물 증감 현황

단위:원

구 분	당 초	변 경	비 고
반영금액	13,289,463	0	분리 발주
물 량	557톤	161톤	유입펌프장 공사 변경으로 관로공사 축소

□ 건설폐기물 처리

○ 건설폐기물 처리 용역 분리발주(건설폐기물 100톤 이상)

- 관련법규 : 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제15조 및 동법       시행령 제11조(건설폐기물 처리용역의 발주)

○ 용역금액 : 4,312,000원

○ 계약방법 : 수의계약

- 수의계약사유 : 계약금액이 소액

- 관련법규 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령       제25조 제1항 제5호

○ 계약업체 : 우광개발(주)   대표  임태권   032-675-5300

- 서남물재생센터 현대화사업 폐기물 계약업체

□ 감리원 검토의견

○ 전기 옥외인입공사 시 발생되는 건설폐기물 처리를 위하여 분리 발주     하여 처리함이 타당하다고 판단함.

4		보고자 의견

○ 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률에 의거 분리발주하며, 발주금액이     소액이므로 수의계약으로 처리하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 감리원 실정보고 1부.

2. 내역서 1부. 끝.