문서번호	토목부-23726
결재일자	2015.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		권혁대	11/11 노우성
협조

감리용역(총괄8회, 8차1회) 변경 검토보고

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사 전면책임감리용역)

2015.11.

도시기반시설본부

(토목부)

감리용역(총괄8회, 8차1회)변경 검토보고

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사 전면책임감리용역)

「겸재교 건설 및 연결도로 확장공사 전면책임감리용역」의 보조감리원 투입계획 조정(전기→강교)에 따른 설계변경 검토보고임

1		관련근거

❍ 토목부-16839호(2015. 8.12.) 강교감리원 투입계획

❍ 동일(감리) 제15-2932호(2015.11.10.) 설계변경 요청

2		용역개요

❍ 위    치 : 동대문구 휘경동 휘경여중고 삼거리 ~ 중랑구 면목동 동2로 사거리

❍ 규    모 : 본교량 B=18.24m, L=235m / 접속교량 B=9m, L=160m

도로확장 B=20→30m, L=750m

❍ 용역기간 : 총괄 2008.10.10. ∼ 2015.12.31.

(8차 2015. 4.14. ~ 2015.12.31.)

❍ 용 역 비 : 총괄 2,837백만원(8차 350백만원)

❍ 감 리 사 : ㈜동일기술공사외 1개사

3		감리단 제출내용

❍ 주요내용

- 동대문구 램프교량 강교 제작에 따른 보조감리원(전기→강교) 투입계획 재조정

❍ 총괄 및 8차 변경내용

-  보조감리원 투입계획 변경                                                (단위 : 일)

구 분	당 초	변 경	비 고
감리사보	403	337	감 66일(전기)
감리사보	-	66	증 66일(강교)

-  용역비 변경현황                                                       (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총괄	2,837,120,000	2,837,120,000	변경없음
8차	350,000,000	350,000,000	변경없음

4		보고자 검토 및 조치의견

❍ 상기 감리단 보고내용 검토결과 램프교량 강교제작에 따른 보조감리원(전기→강교) 배치        계획 조정에 따른 계약내역 변경이 필요함

❍ 상기 사항에 대하여 변경계약을 체결하여 원활한 사업을 추진하고자 함

❍ 총괄 및 8차 변경계약 내용                                          (단위 : 원)

구 분	용 역 비		용 역 기 간		비 고
	당초	변경	당초	변경
총괄	2,837,120,000	변경없음	2008.10.10. ~ 2015.12.31.	변경없음
8차	350,000,000	변경없음	2015. 4.14. ~ 2015. 12.31.	변경없음

붙 임 : 1) 감리사 설계변경 요청서 1부.

2) 강교감리원 투입계획 1부.  끝.