투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1차) 설계변경 시행(1차1회) 및 계약의뢰

우리부에서 시행중인 하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1차) 설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1차)

나. 계 약 자 : ㈜대한컨설탄트 대표 이우정 외2개사

다. 용역개요 : 하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리(토목)

라. 변경사유 : 건설사업관리기술자(고급) 1인 공사 추진공정에 따라 투입시기 조정으로 인한 비용 감소로 당초 기술자 수 감 조정에 따른 설계변경 및 과업수행기간 연장

마. 용역기간

0. 총      괄 : 2015.03.13 ~ 2018.08.08.(변경없음)

0. 금      회   - 당 초 :  2015.03.13 ~ 2015.11.12

- 변 경 :  2015.03.13 ~ 2015.12.24.

바. 계약금액

0. 총      괄 : 1,925,000,000원(변경없음)

0. 기  시  행 :            0원

0. 금      회 :  당초 : 330,000,000원 ⇒ 변경 : 282,300,000원

0. 장      래 : 1,642,700,000원

사. 예산과목 【2014회계연도 사고이월 예산】

- 광역교통시설특별회계 : 광역철도건설(광역교통시설특별회계) 광역철도건설사업, 하남선(5호선연장) 광역철도건설, 시설비및부대비, 감리비.(142,000천원)

- 교통사업특별회계 : 광역철도건설(교통개선분담금) 광역철도건설사업, 하남선(5호선연장) 광역철도건설, 시설비및부대비, 감리비.(140,300천원)

붙임 :  1. 합의 각서 1부.

2. 변경 설계서(1차1회) 1부.

3. 검토 보고서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김소연		토목3과장	김정수		도시철도토목부장	11/11 김진팔
협조자	주무관	장대성		기획예산과장	안순봉		계약2팀장	홍연화
시행	도시철도토목부-14229	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 (무교동, 프리미어플레이스 빌딩 9층)	/
전화	02)772-7121	/전송	02)772-7306	/	ruracom@seoul.go.kr	/	대시민공개