문서번호	정수시설과-4478
결재일자	2015.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
나필수		남효돈	11/12 代손수곤
협 조
	주무관			김희수

2015년 일반 전기설비 유지보수공사(연간단가) 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

2015년 일반 전기설비 유지보수공사(연간단가) 설계변경 검토 보고

2015년 일반 전기설비 유지보수공사(연간단가) 시행으로 발생한 시공물량 증․감 사항에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 함.

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2015년 일반 전기설비 유지보수공사(연간단가)

○ 공사규모 : 1오니장옆 가로등 인입선 교체공사 , 1·2취수장 배수펌프 인입선 설치공사, 지하 공동구 조명등 및 염소가스차단 폼(방화패드) 설치공사, 2송수실 전동밸브 전원공사, 침전지·약품투입실 외등 전원공사, 직원식당 에어컨 전원공사, 취수장 탈의실 전기공사, 여과지 염소가스차단 폼(방화패드) 설치공사 등.

○ 계약금액 : 34,959,300원

○ 공사기간 : 2015. 4. 1 ~ 2015. 12. 31

○ 계 약 자 : ㈜한국콘트롤  대표 홍 관 표

□ 공종별 설계변경 증·감내역

공 종	규 격	단위	수량변경내역		증 감
			변경전	변경후
1) 기본공사
접지봉 설치	Φ16×1800L 1본	개소	5	0	-5
접지봉 설치	Φ16×1800L 2본	개소	5	0	-5
접지봉 설치	Φ16×1800L 3본	개소	5	0	-5
접지봉 설치	접지봉 14Φ×1000 mm	개소	5	0	-5
접지단자함	5회로	면	2	0	-2
내열비닐절연전선(HIV)_옥내	450/75OV HFIX 2.5㎟	m	6	0	-6
내열비닐절연전선(HIV)_옥내	450/75OV HFIX 4㎟	m	6	0	-6
내열비닐절연전선(HIV)_옥외	450/75OV HFIX 2.5㎟	m	6	38	+32
내열비닐절연전선(HIV)_옥외	450/75OV HFIX 4㎟	m	6	0	-6
난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kV F-GV 2.5㎟	m	6	0	-6
난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kV F-GV 2.5㎟	m	6	0	-6
난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kV F-GV 4㎟	m	6	48	+42
난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kV F-GV 4㎟	m	6	205	+199

공 종	규 격	단위	수량변경내역		증 감
			변경전	변경후
난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kV F-GV 6㎟	m	6	0	-6
난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kV F-GV 6㎟	m	6	267	+261
난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kV F-GV 10㎟	m	6	0	-6
난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kV F-GV 10㎟	m	6	0	-6
난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kV F-GV 16㎟	m	6	0	-6
난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kV F-GV 16㎟	m	6	0	-6
난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kV F-GV 25㎟	m	6	0	-6
난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kV F-GV 25㎟	m	6	0	-6
난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kV F-GV 35㎟	m	6	0	-6
난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kV F-GV 35㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 1C 6㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 1C 6㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 2.5㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 2.5㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 4㎟	m	6	59	+53
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 4㎟	m	6	104	+98
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 6㎟	m	6	68	+62
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 6㎟	m	6	144	+138
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 10㎟	m	6	169	+163
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 10㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 16㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 16㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 35㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 35㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 4㎟	m	6	135	+129
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 4㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 6㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 6㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 10㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 10㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 25㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 25㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 35㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 35㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 4㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 4㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 6㎟	m	6	45	+39
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 6㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 10㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 10㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 16㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 16㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 35㎟	m	6	0	-6
가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 35㎟	m	6	0	-6

공 종	규 격	단위	수량변경내역		증 감
			변경전	변경후
러그단자	동관단자 1 HOLE 10 ㎟	개	5	0	-5
러그단자	동관단자 1 HOLE 16 ㎟	개	5	0	-5
러그단자	동관단자 1 HOLE 25 ㎟	개	5	0	-5
러그단자	동관단자 1 HOLE 35 ㎟	개	5	0	-5
제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 2C 1.5㎟	m	6	0	-6
제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 4C 1.5㎟	m	6	0	-6
제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 4C 2.5㎟	m	6	0	-6
제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 10C 1.5㎟	m	6	0	-6
제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 12C 1.5㎟	m	6	0	-6
제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 2C 1.5㎟	m	6	0	-6
제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 4C 1.5㎟	m	6	0	-6
제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 6C 1.5㎟	m	6	0	-6
제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 10C 1.5㎟	m	6	0	-6
제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 15C 1.5㎟	m	6	0	-6
컴퓨터용 케이블	AWG #20 0.5, 4C	m	6	0	-6
콘센트	매입-접지형,15A 250V 1구	개	5	0	-5
콘센트	매입-접지형,15A 250V 2구	개	5	2	-3
콘센트	매입-접지형,15A 250V 3구	개	5	0	-5
콘센트	누전차단기형,15A 250V 2구접지	개	5	0	-5
콘센트	방우형, 15A/250V, 1구	개	5	0	-5
콘센트	방우형, 15A/250V, 2구	개	5	0	-5
아우트렛박스	중형4각 54㎜	개	5	4	-1
아우트렛박스	8각 54㎜	개	5	0	-5
시스템 박스	ACCESS FLOOR용 AL. 전열2구	개	5	0	-5
조명기구	LED 7W - 벽부망등	개	2	0	-2
조명기구	LED 7W - 직부등	개	2	0	-2
조명기구	FL 26W/2 - 다운라이트	개	2	0	-2
조명기구	LED 30W - 다운라이트	개	2	0	-2
조명기구	FL 32W/2 - 방진방습등	개	2	0	-2
조명기구	LED 22W/2 - 방진방습등	개	2	0	-2
조명기구	LED 22W/2 - 슬림파라보릭	개	2	0	-2
조명기구	LED 22W/2 - 슬림파라보릭(축전지내장)	개	2	0	-2
조명기구	LED 22W/2 - 매입슬림	개	2	0	-2
조명기구	LED 22W/2 - 매입슬림(축전지내장)	개	2	0	-2
조명기구	LED 22W/2 - 삼각등	개	2	0	-2
조명기구	32W/2 - 파이프펜던트갓등	개	2	0	-2
조명기구	LED 22W/2 - 파이프펜던트갓등	개	2	0	-2
조명기구	MH 150W/1 - 옥외보안등	개	2	0	-2
조명기구	LED 54W/1 - 태양광보안등	개	2	0	-2
조명기구	POWER LED 54W – 수목,건물투사등	개	5	0	-5
형광등기구 보강대	행가 스프링형	개	5	0	-5
단로램프 스위치	단로 2구 스위치	개	5	0	-5
스위치박스	1개용 54 mm	개	5	3	-2
스위치박스	2개용 54 mm	개	5	0	-5
조명기구	MH 150W/1 - 옥외보안등	개	5	0	-5

공 종	규 격	단위	수량변경내역		증 감
			변경전	변경후
강제전선관_옥내	아연도 16 mm	m	7	0	-7
강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 16 mm	m	7	0	-7
강제전선관_옥내	아연도 22 mm	m	7	0	-7
강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 22 mm	m	7	81	+74
강제전선관_옥내	아연도 28 mm	m	7	0	-7
강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 28 mm	m	7	119	+112
강제전선관_옥내	아연도 36 mm	m	7	0	-7
강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 36 mm	m	7	27	20
강제전선관_옥내	아연도 42 mm	m	7	0	-7
강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 42 mm	m	7	0	-7
강제전선관_옥내	아연도 54 mm	m	7	0	-7
강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 54 mm	m	7	0	-7
강제전선관부속품	위샤캡 28C	m	7	0	-7
1종금속제가요전선관_옥내	16 mm 비방수	m	7	0	-7
1종금속제가요전선관_옥내	22 mm 비방수	m	7	0	-7
1종금속제가요전선관_옥내	28 mm 비방수	m	7	0	-7
1종금속제가요전선관_옥내	36 mm 비방수	m	7	0	-7
2종금속제가요전선관_옥내	프리카튜브, 17 mm 방수	m	7	0	-7
2종금속제가요전선관_옥내	프리카튜브, 24 mm 방수	m	7	0	-7
2종금속제가요전선관_옥내	프리카튜브, 38 mm 방수	m	7	0	-7
2종금속제가요전선관_옥내	프리카튜브, 50 mm 방수	m	7	0	-7
폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 16㎜	m	7	0	-7
폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 16㎜	m	7	0	-7
폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 22㎜	m	7	0	-7
폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 22㎜	m	7	0	-7
폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 28㎜	m	7	0	-7
폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 28㎜	m	7	0	-7
폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 36㎜	m	7	0	-7
폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 36㎜	m	7	0	-7
폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 42㎜	m	7	0	-7
폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 42㎜	m	7	0	-7
폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 54㎜	m	7	0	-7
폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 54㎜	m	7	0	-7
경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 16 mm	m	7	0	-7
경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 22 mm	m	7	0	-7
경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 22 mm	m	7	0	-7
경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 28 mm	m	7	0	-7
경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 28 mm	m	7	0	-7
경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 36 mm	m	7	0	-7
경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 36 mm	m	7	0	-7
경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 42 mm	m	7	0	-7
경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 42 mm	m	7	0	-7

공 종	규 격	단위	수량변경내역		증 감
			변경전	변경후
경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 54 mm	m	7	0	-7
경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 54 mm	m	7	0	-7
경질비닐PVC전선관-매입	HI 28 mm	m	7	0	-7
경질비닐PVC전선관-매입	HI 36 mm	m	7	0	-7
경질비닐PVC전선관-매입	HI 42 mm	m	7	0	-7
파상형 경질폴리에틸렌 전선관	100㎜-1열	m	7	0	-7
풀박스	100x100x75	개	5	0	-5
풀박스	150x150x100	개	5	1	-4
풀박스	200x200x100	개	5	2	-3
레이스웨이	BODY, 70 x 40	개	5	0	-5
케이블트레이	300W/150H, 사다리형	m	5	0	-5
케이블트레이 커버	300W 커버	m	6	0	-6
케이블트레이 HOR-ELBOW	300W HOR-ELBOW, 150H	m	6	0	-6
케이블트레이 VER-ELBOW	300W VER-ELBOW, 150H	m	6	0	-6
케이블트레이	400W/150H, 사다리형	m	5	0	-5
케이블트레이 커버	400W 커버	m	5	0	-5
케이블트레이 HOR-ELBOW	400W HOR-ELBOW, 150H	m	6	0	-6
케이블트레이 VER-ELBOW	400W VER-ELBOW, 150H	m	6	0	-6
케이블트레이 HOR-CROSS	400W HOR-CROSS, 150H	m	5	0	-5
케이블트레이 HOR-TEE	400W HOR-TEE, 150H	m	5	0	-5
전선관지지행거	W:200	개	5	0	-5
전선관지지행거	W:300	개	5	0	-5
전선관지지행거	W:400	개	3	0	-3
전선관지지행거	W:400	개	3	0	-3
배선용 차단기	2P 30AF, 14kV, 3~30A	개	3	0	-3
배선용 차단기	3P 30AF, 14kV, 3~30A	개	3	0	-3
배선용 차단기	4P 30AF, 14kV, 3~30A	개	3	0	-3
배선용 차단기	2P 50AF, 18V, 15~50A	개	3	0	-3
배선용 차단기	3P 50AF, 18V, 15~50A	개	3	2	-1
배선용 차단기	4P 50AF, 18kV, 15~50A	개	3	0	-3
배선용 차단기	2P 60AF, 18kV, 15~60A	개	3	0	-3
배선용 차단기	3P 60AF, 18kV, 15~60A	개	3	0	-3
배선용 차단기	4P 60AF, 18kV, 15~60A	개	3	0	-3
배선용 차단기	2P 100AF, 37kV, 15~125A	개	3	0	-3
배선용 차단기	3P 100AF, 37kV, 15~125A	개	3	0	-3
배선용 차단기	4P 100AF, 37kV, 15~125A	개	3	0	-3
누전차단기	분전반용, 2P 30AF, 5~30A	개	3	0	-3
누전차단기	분전반용, 3P 30AF, 5~30A	개	3	0	-3
누전차단기	분전반용, 2P 50AF, 15~50A	개	3	0	-3
누전차단기	분전반용, 3P 50AF, 15~50A	개	3	0	-3
누전차단기	분전반용, 2P 100AF, 60~100A	개	3	0	-3
누전차단기	분전반용, 3P 100AF, 60~100A	개	3	0	-3
인력터파기	견질토사 0~1M	㎥	3	0	-3
인력터파기	견질토사 0~1M, 야간	㎥	3	0	-3
인력터파기	견질토사 1~2M	㎥	3	135	132
인력터파기	견질토사 1~2M, 야간	㎥	3	0	-3

공 종	규 격	단위	수량변경내역		증 감
			변경전	변경후
되메우기	인력	㎥	3	0	-3
되메우기	인력, 야간	㎥	3	135	132
잔토처리	현장처리	㎥	3	0	-3
2) 신규 추가 공사
LED 조명	45W	개	0	2	+2
파상형 폴리에틸렌 전선관	30MM	M	0	180	+180
찬넬	2.3T,41*41	개	0	29	+29
스트롱앵커	3/8	개	0	137	+137
강재전선관용 부품	노말밴드, 아연도 36MM	개	0	6	+6
풀박스	300*400*200	개	0	2	+2
방화패드	5T	개소	0	18	+18
강재전선관용 부품	노말밴드,아연도28MM	개	0	12	+12
합성수지제 강제전선관	CD22MM	M	0	53	+53
플렉시블 전선관(코프렉스)	28C 고장력방수	M	0	6	+6
박스커넥터	코프렉스 28MM 방수	개	0	14	+14
가로등 점멸기	전자식보안등	개	0	1	+1
1종 금속제가요전선관	고장력방수, 36MM	M	0	30	+30
UTP케이블	UTP CAT.5, 4P	M	0	34	+34
배관용 구멍뚫기(코어드릴)	두께15CM이하, A30mm	개소	0	3	+3
분전반	3회로(노출)	면	0	1	+1
합성수지제가요전선관	CD- 난연성 16MM	M	0	13	+13
스위치	단로, 15A 250V, 1구	개	0	1	+1
LED 조명	31W	개	0	1	+1
소프트스타터	22KW,380V, 바이패스내장형	대	0	1	+1

□ 설계변경 내역

구 분	금액(원)		증·감 (원)	비고
	당초	변경
총공사비	34,959,300	34,959,300	0
재료비·노무비	23,453,428	24,732,172	증)128,744	시공물량조정
산재보험료	646,247	651,761	증)5,487
고용보험료	147,956	149,218	증)1,262
건강보험료	299,933	0	감)299,933
연금보험료	439,314	0	감)439,314
노인장기요양보험료	19,645	0	감)19,645
기계경비	412,162	334,422	감)77,740
안전관리비	404,767	0	감)404,767
기타경비	1,547,926	1,632,323	증)84,397
기타	7,587,922	7,459,404	감)128,518

□ 조치 의견

○ 상기와 같이 시공물량 증·감사항 및 보험료정산에 대하여 설계변경을    시행코자 합니다.

붙 임 : 1. 변경설계내역서 1부.

2. 설계변경 합의서 1부.  끝.