문서번호	도로보수과-5010
결재일자	2015.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	도로보수과장
홍수종	11/12 국중진

작업완료 보고서(제7차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

성동도로사업소

(도로보수과)

·

작업완료보고

□ 공사 일반현황

○ 공  사  명 : 2015년 관내포장도로굴착복구공사(연간단가계약)

○ 공 사 개 요 : 소규모 포장복구 : 56a, 절삭후덧씌우기 : 152a

○ 공사기간 : 2015. 3. 10 ~ 2015. 12. 31

○ 착  공  일 : 2015. 3. 10

○ 준공예정일 : 2015. 12. 31

○ 도  급  자 : 정만건설(주)  박창엽

○ 도 급 비 : 601,176,180원

□ 보고현황

【7차】

○ 7차 작업지시

- 작업지시일 : 2015. 9. 3

- 작업지시내용 : 광진구 뚝섬로 400앞외 6개소

(굴착복구A-1 : 6.52a, 차로단위복구 : 31.88a)

○ 작업완료 내용(7차)

- 작업완료일 : 2015. 11. 10

- 작업완료내용 : 뚝섬로 400앞외 5개소

(굴착복구A-1 : 7.4a, 차로단위복구 : 20.74a)

연번	위 치	포장 종류 및 등급	지시내용			복구내용			비 고
			폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
7-1	뚝섬로 400 앞 (성수동2가)	A-1	1.2	1.6	1.92	0.5	1.4	0.7
7-2	휘경동 336-10 앞	A-1	1.2	7.0	8.4				사업취소
7-3	광장동 320-4 앞	A-1	1.2	140.0	168.0	1.5~2.8	147.7	231.57
		평삭(A-1)	4.0	140.0	560.0	3.5	140.0	490.0
7-4	용두동 36-1 앞	A-1	1.3	25.0	32.5	1.3~3.0	26.9	49.87
		평삭(A-1)	3.0	25.0	75.0	9.0~10.0	19.4	186.4
7-5	금호동4가 1264-6 앞	A-1	1.2	363.0	435.6	1.0~2.0	345.8	451.4
		평삭(A-1)	3.5	363.0	1,270.0	노후포장정비 시행
7-6	동일로 16(자양동203-21)	A-1	1.2	5.0	6.0	1.3	5.3	6.89
7-7	면목로 269~303	평삭(A-1)	3.7	347.0	1,283.9	3.8~15.0	361.0	1,398.4
계								740.43 (2,074.8)

○ 작업현황

□ 조치사항

○ 위 내용과 같이 사업취소(1개소)를 제외한 복구 완료된 구간에 대하여 추후          설계변경에 반영하여 준공처리 하고자 합니다.

붙임 : 작업완료보고서 1부(별도). 끝.