투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제 목	예산 재배정 요청(2015년 도시고속도로 기능개선 전기공사 관련)

1. 귀부서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소(기전과)에서 시행 중인 『2015년 도시고속도로 기능개선 전기공사』와 관련하여 대해 아래와 같이 필요 예산을 요청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건 명 : 예산 재배정 요청(2015년 도시고속도로 기능개선 전기공사)

나. 예산 재배정 요청 사유

- 설계 미반영 공종에 대한 증액분 발생

다. 예산 재배정 요청 금액 : 금11,597천원

예 산 과 목	재 배 정 요청액(천원)	산 출 내 역	비 고
교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 도시고속도로 소통강화, 도시고속도로 기능개선, 시설비	11,597	CCTV 이설 및 통신맨홀 이설 - 14,018천원×1식	공사 낙찰차액 2,420천원

※ 부족금액 금2,420(천원)은 공사 집행(낙찰) 잔액 활용

라. 예산 재배정 및 지출 현황(참고)

구 분	재배정액 (원)	품의금액 (원)	원인행위금액 (원)	잔액 (원)
계	18,810,000	18,810,000	16,389,480	2,420,520
2015년 도시고속도로 기능개선 전기공사	18,810,000	18,810,000	16,389,480	2,420,520

붙  임 : 설계변경사항 발생 보고서 1부. 끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	전상은		주무관	허송욱		기전과장	11/12 유재옥
협조자
시행	기전과-5435	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	02-3284-5433	/전송	02)3284-5470	/		/	부분공개(5)