문서번호	토목부-23842
결재일자	2015.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		권혁대	11/12 노우성
협조

건설폐기물 자원 재활용 방안 검토보고

(서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

2015.11.

도시기반시설본부

(토목부)

건설폐기물 자원 재활용 방안 검토보고

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

자원 재활용 및 예산 절감을 위해 서빙고로 아스팔트 평삭 및 임시 가설교량의 바닥단 철거시 발생하는 건설폐기물(폐아스콘) 처리방안에 대해 검토 보고드림

1		관련근거

❍ 도시기반시설본부-15-4573호(2015. 9. 3.) 폐아스팔트 재활용 검토요청

❍ 한종(서빙고) 제15-213호(2015. 11. 9.) 폐아스팔트 재활용 검토보고

2		공사개요

❍ 위    치 : 용산구 보광동 ~ 주성동(두무개길 ~ 강변북로)

❍ 규    모

- 기존고가 철가 : B=16m, L=510m

- 고가설치 : B=6.4, L=115m / B=10.4, L=290m

❍ 공사기간 : 총괄 2011. 1. 6. ∼ 2015.12.31.(5차 2015. 3. 2. ~ 2015.12.31.)

❍ 도 급 비 : 총괄 20,221백만원(5차 7,893백만원)

❍ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외 1    ❍ 시 공 사 : 주식회사 흥화 외 1

3		감리단 보고내용

❍ 현 황 및 문제점

1) 폐아스팔트 발생현황

구 분	형상	발생량(톤)	비고
서빙고로(고가하부)	평삭	1,637	T=5㎝
임시 가설교량	덩어리	175	T=2㎝
합 계		1,812

2) 서빙고로

- 교통통행으로 인하여 야간 평삭후 아스팔트 포장(운반비 야간적용 필요)

3) 임시 가설교량

- 임시 가설교량 설치시 복공판 위 부직포 포설후 아스팔트 포장함

- 일부 구간 시험 철거한 결과 폐아스팔트에 부직포가 부착되어 있어,

현장에서 부직포를 제거하여 반출하여야 하는 문제점이 있음.

❍ 재활용에 따른 운반비 검토

1) 폐아스콘 재활용에 대한 회의결과(붙임 참조)

- 계약된 폐기물 처리용역사는 재활용에 동의함

- 폐기물운반은 실거리에 따른 운반비 반영이 필요함

2) 운반비 검토

① 운반로

- 당초 : 폐기물 처리 용역 계약 거리(L=26.8㎞)

- 변경 : 재활용 업체[중앙아스콘(주)] 거리(L=52.0㎞)

구 간	시 점	종 점	거 리	적재시	공차시	비 고
1구간	현장	응봉지하차도	L= 6.1km	20km/h	25km/h
2구간	응봉지하차도	장암교차로	L=25.1km	50km/h	55km/h
3구간	장암교차로	폐기물 처리장	L=20.8km	30km/h	35km/h
합 계			L=52.0km

② 운반비

구 분	산출단가	협의율	적 용	비 고
폐기물 운반비(톤)	13,928	92.88%	16,398	야간

※ 기계약에 대한 폐기물 처리비를 감소시킴에 따라 협의율 적용함.

※ 협의율 = (100+낙찰율85.761)/2= 92.88%

③ 재활용에 따른 운반·처리비 비교 검토

공 종 명	규격	단위	수 량	공사비(천원)			비고
				당 초	변 경	증ㆍ감
1. 폐기물 운반비
폐아스콘	L=26.8㎞, 절삭	ton	1,637	8,362	26,844	18,482
2. 폐기물 처리
폐아스콘	L=26.8㎞, 절삭	ton	1,637	17,463	0	-17,463
합 계				25,825	26,844	-1,019
공급액				25,825	26,843	1,018
부가가치세				2,582	2,684	102
도급액				28,407	29,527	1,120

※ 임시가설교량 폐아스콘은 제외(별도의 부직포 제거작업이 필요)

※ 당초 계약의 운반․처리비보다 재활용 비용이 증가함

❍ 검토의견

- 상기 검토내용과 같이 폐아스콘 재활용에 대하여 검토결과 당초 계약의      운반·처리 비용보다 재활용 비용이 증감함에 따라 재활용은 예산절감      효과가 없어 당초 계약으로 폐아스콘을 처리함이 타당하다고 사료됨.

4		조치계획

❍ 2013. 3. 7. 자원 재활용 및 예산절감을 위해 폐아스팔트 입찰공고시 처리비용은  무대, 운반 비용만 지급을 명시하여 일반공개경쟁입찰을 시행하는 폐아스팔트 처리  방법 개선[도로관리과-3527호]안이 시달되었으나

❍ 본공사 폐기물처리용역은 시달 이전에 발주 및 계약이 이뤄져 금번에 발생하는 폐

아스팔트에 대하여 폐기물처리업체와 협의하여 상기 개선안을 적용하려 하였으나,        기 계약되어 있는 폐기물처리비 무대에 따른 실운반비 적용에 대한 감리단 검토결과        예산절감 효과가 없으므로 당초 계획대로 전량 폐기물 처리하고자 함

붙 임 : 감리검토의견서 1부.  끝.