문서번호	도로보수과-8503
결재일자	2015.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
이문희		김환겸	11/13 임대성
협조	주무관		송광석
	주무관		이민호

“2015년 포장도로 굴착복구공사”

헌릉로 포장복구검토 보고

2015. 11. 12.

동부도로사업소

[도로보수과]

“2015년 포장도로 굴착복구공사”

헌릉로 포장복구 검토 보고

포장도로 노후된 헌릉로에(내곡IC~염곡IC) 통신 굴착공사, 굴착복구 시행도로정비공사, 노후포장도로 정비공사가 혼재되어 있어 각 사업간 구간을 조정하여 효율적인 도로 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	사업개요

❍ 2015년 포장도로 굴착복구공사

⦁계약업체 : 엘유테크건설(주) 대표 이기욱

⦁계약금액 : 1,870,827,230원

⦁공사기간 : 2015.3.13. ~ 12.31.

⦁공사규모 : 굴착복구 176a, 차로단위복구 484a, 소파보수 166a

Ⅱ	추진경과

❍ 2015. 02. 03. : 공사발주

❍ 2015. 03. 13. : 공사계약 및 착공

❍ 2015. 08. 05. : 설계변경(1회)

❍ 2015. 08. 10. : 기성준공(1회)

❍ 2015. 11. 09. : 설계변경(2회)

Ⅲ	보고내용

❍ 굴착복구공사 구간인 헌릉로(내곡IC→염곡IC)에 당초 차도복구로 예상되어 1개 차로를 제외하고 굴착복구 시행도로 정비를 계획하였으나, 일부구간을 제외하고 보도부분으로 굴착허가 됨.

⦁시행도로 계획구간 : L=2,975m

⦁통신 굴착공사 구간 : 차도 L=827m, 보도 2,148m

❍ 통신 굴착공사 구간중 보도로 허가된 구간은 공사의 연속성을 위해 굴착복구 시행도로에서 정비하고, 동 공사로 인해 예산 부족으로 시행하지 못하는 구간(L=539m, 65.5a)은 굴착복구공사의 포장정비 예산으로 시행코자 함.

❍ 굴착복구공사의 반대편(염곡IC→내곡IC)은 노후포장도로 정비공사에서 정비를 진행중에 있으나, 예산부족으로 내곡IC 주변(L=130m, A=25a)은 재포장에서 제외되었으나 포장도로 관리의 연속성을 위해 굴착복구공사에서 포장정비 예산으로 시행코자 함.

굴착복구 포장 : 539m,(65.5a)

굴착복구 포장 : 130m,(25a)

Ⅳ	조치계획

❍ 상기 보고내용과 같은 사항으로서 현장 여건을 감안, “2015년 포장도로 굴착복구공사 계약업체”에 노후포장도로 정비예산(3억)을 사용, 도로 재포장하여 도로유지관리에 만전을 기하고자 함.

⦁포장개요 : L=670m,  A=90.5a

⦁개략공사비 : 117백만원(공사비42백만원, 관급자재64백만원, 폐기물11백만원)

❍ 예산과목 : 도시개발특별회계(노후포장도로)

붙임 :  1. 공사위치도

2. 사진현황 1부.

3. 개략공사비 1부.  끝.