문서번호	시설과-8354
결재일자	2015.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
송창선		김한준	11/13 이용태
협조

중랑캠핑숲내 청소년체험의숲 조성공사 실정검토사항(3차) 보고

2015. 10

중부공원녹지사업소

(시설과)

중랑캠핑숲내 청소년체험의숲 조성공사 실정검토사항(3차) 보고

중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성공사의 공사감독을 맡고 있는 시설관리공단으로부터 실정사항(3차)이 접수되어 검토하고 보고합니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성공사

○ 공사기간 : 2015년 4월 20일 ~ 2015년 11월 30일

○ 도 급 액 : 749,384,000원

○ 도 급 자 : 아이서비스(주) 김세민

□ 검토내용(시설관리공단)

구 분	현황 및 문제점	검 토 의 견	비 고
그물망 설치	▷외부전문가 안전성 자문의견에 따라 플라잉팍스3 구간에 체험자 추락 시 보호할 수 있는 안전망 설치필요	▶플라잉팍스3구간에 체험자 추락 시 보호할 수 있는 안전망 설치 ⁃ 안전망(20m×W2.4) : 0→1개소
개인장비 및 구조장비	▷청소년 체험의 숲 운영에 필요한 안전보호 및 구조장비가 부족하여 추가 공사반영 필요	▶청소년 체험의 숲의 원활한 운영을 위하여 안전장비 및 구조장비 추가 공사반영 ⁃ 헬멧(보호구) : 30→40EA ⁃ 하네스(전신일체형) : 30→40셋트 ⁃ 데이지체인 : 30→40EA ⁃ 캐러비너 : 60→80EA ⁃ 세이프롤러 : 30→40EA ⁃ 스마트세이프롤러 : 0→2EA ⁃ 사다리 : 0→2EA ⁃ 스테틱로프(6mm, 50m) : 0→1롤 ⁃ 안전매트(1200*2400*300) : 0→2EA ⁃ 소화기함(목재) : 0→1EA ⁃ 들것 (알루미늄접이식) : 0→2EA ⁃ 선반(H1800*L1100*W450): 0→3EA

구 분	현황 및 문제점	검 토 의 견	비 고
대피소 추가설치	▷외부전문가 안전성 자문의견에 따라 카고네트 코스 구간에 포기자 대피장소 추가설치 검토 필요	▷분기장치를 설치시 기존 코스의 와이어로프 및 빌레이케이블을 분절하여 시공해야 하며, 분절 코스 좌우 양쪽 코스 및 케이블 장력문제로 재조정해야하는 단점이 있음. 또한, 설치하여 운영시 체험자가 코스 이탈을 할 우려가 있으며, 고정 운영인력의 상시대기가 필요 ▷하강시설의 설치는 기 구입한 하이코스 전문 구조장비인 ‘밀란’을 활용하여 대체가능 ▷스마트빌레이는 연속빌레이시스템이 적용된 코스에서 운영자가 체험자와 체험자 사이를 건너뛸 수 있어, 체험운영 중에도 체험 포기자에게 신속하게 접근이 가능. 사다리 등 높은 코스에 접근하는 것은 또다른 안전사고를 유발할 수 있음(설계사 검토의견)

□ 공사비 변경

구 분	도급공사비	1차 변동금액	금회 변동금액	총 변동금액
총공사비	835,142,080	105,659,490	34,497,000	140,156,490
도 급 비	749,384,000	110,177,000	34,497,000	144,674,000
이 전 비	15,000,000	7,742,000	0	7,742,000
관급자재비	70,758,080	-12,259,510	0	-12,259,510

□ 검토의견

○ 청소년 체험의 숲 관리·운영상 필요한 시설 및 조치사항으로 공사감독 기관의 실정보고 사항을 승인처리하며,

○ 대피소 추가설치는 기술적인 단점과 운영시 체험자 이탈우려 및 또다른 안전사고에 유발이 우려된다는 의견이 있는 바, 현행대로 유지하되 3코스 선택지점에 경고 안내판 부착

○ 상기 사항에 대해 소요되는 예산은 낙찰차액 및 집행잔액으로 시행

첨 부 : 실정사항 검토 공문 1부.  끝.