문서번호	조경과-16094
결재일자	2015.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장
방성원	하재호	11/13 代김광형

「옥상녹화 기술 및 태양광 발전 연계 가이드라인과 옥상녹화-공조기 연계 시스템 개발」 용역 기간 변경 계획

2015. 11.

푸른도시국

(조경과)

「옥상녹화 기술 및 태양광 발전 연계 가이드라인과

옥상녹화-공조기 연계 시스템 개발」 용역 기간 변경 계획

1차년도 「옥상녹화 기술 및 태양광 연계 가이드라인과 옥상녹화-공조기 연계 시스템 개발」 기술용역을 효과적으로 추진하여 조기 준공됨에 따라 원활한 용역 추진을 위해 용역기간을 변경하고자 함.

▢ 용역개요

◦ 용 역 명 : 「옥상녹화 기술 및 태양광 발전 연계 가이드라인과 옥상녹화-공조기 연계 시스템 개발」 기술용역

◦ 용역기간 : 2014. 12. 30. ~ 2016. 12. 28.(장기계속계약)

- 금차 완수일자 : 2015. 12. 29., 총완수일자 : 2016. 12. 28.

◦ 계약금액 : 166,250천원(금차계약금액 83,125천원)

◦ 계약업체 : ㈜한설그린(대표계약자), 동국대학교 산학협력단(공동수급자)

▢ 변경내용 : 1, 2차년도 계약기간 변경(금액변동 없음)

구분	변경전	변경후	비고
1차년도	2014.12.30.~2015.12.29.	2014.12.30.~2015.11.30.
2차년도	2015.12.30.~2016.12.28.	2015.12. 1.~2016.11.30.

▢ 변경사유

◦ 과업을 효과적으로 추진하여 공기를 1개월 단축함으로써, 1차년도 용역을 조기에 준공하게 됨.

▢ 행정사항

◦ 1, 2차년도 용역기간 변경계약 체결 요청(재무과)

붙  임 : 합의각서 1부.  끝.