문서번호	토목부-23950
결재일자	2015.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
김종혁		이승우	11/13 노우성
협조

설계자문회의 개최 계획

[올림픽대로~여의도간 진입램프 설치 실시설계]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
도로계획과-1620 (2015.10.02.)	도로계획과	실시설계 시행 요청	실시설계 추진

2015.11.

도시기반시설본부

(토목부)

설계자문회의(서면) 개최 계획

건설기술진흥법 제6조, 동법시행령 제19조 및 서울특별시 건설기술심의위원회

조례에 의거 우리 본부에서 시행중인 「올림픽대로~여의도간 진입램프 설치 실시설계용역」의 내실화를 위해 설계자문회의(서면)를 개최코자 함.

용역 개요

○ 용역명 : 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치 실시설계

○ 위  치 : 올림픽대로 서울교~여의동로

○ 규  모 : 진입램프 설치 L=764.4m, B=6.4m, 올림픽대로 이설 L=980m

○ 사업비 : 5,000백만원

○ 용역기간 : 2012.4.12. ~ 2015.12.30.

설계용역 추진현황

○ 2012.04.12. : “여의교 확장 외 1개사업 기본 및 실시설계용역” 착수

○ 2012.11.23. ~ 2014.10.01. : 하천점용 협의 (6회)

○ 2014. 8. 6. : 서울시민디자인위원회

○ 2014.12.12. : 기본설계 자문회의

○ 2015. 1.12. ~ 08.05. : 도시철도(5호선) 간섭 사전협의

○ 2015. 9.24. : 기본설계 기술심의(조건부 : 실시설계시 심의 받을 것)

○ 2015.10. 2. : 실시설계 요청 (도로계획과→토목부)

설계자문회의(서면) 개최 계획

○ 일  시 : 2015. 11. 17.(화)

○ 안  건 : 연결램프 평면 및 종단선형 변경, 교량 형고 변경 등

○ 서면심의 사유

- 2015.10. 2. 기본설계를 완료하고 실시설계 착수(도로계획과→토목부)하였으나 실시설계 기간(3개월)이 촉박하고 실시설계 기술심의가 예정되어 있어 기본설계 주요 변경 사항에 대해서 서면 심의를 계획함.

○ 위 원

- 설계자문회의 위원은 기본설계 건설기술심의위원과 동일하게 선정하였음.

구 분	분 야	소 속	직 책	성 명	비고
외부위원	도로	동일기술공사	사 장	한 상 주
	구조	연세대학교	교 수	김 상 효
	교통	아주대학교	교 수	최 기 주
내부위원	유지관리	안전총괄본부 교량안전과	과 장	이 용 심

붙임 : 1) 자문자료(별도송부) 1부.

2) 자문의견양식 1부.  끝.