문서번호	시설과-8362
결재일자	2015.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
송창선		김한준	11/13 이용태
협조

남산공원 녹지복원사업 추진계획

2015. 11

중부공원녹지사업소

(시설과)

남산공원 녹지복원사업 추진계획

남산공원 내 용도가 폐기된채 방치된 각종 구조물과 수원고갈과 음용 부적합으로 폐쇄된 약수터를 정비하고자 함

추진경위

○ ‘15. 08. 07 : 남산 시설물 보수정비사업 추진계획 수립

○ ‘15. 08. 27 ~ 9. 15 : 실시설계용역 시행

- 각종 구조물철거 및 폐쇄약수터 정비 내용으로 자체검토 시행

○ ‘15. 11. 10 : 계약심사 완료

- 일위대가 7종 조정 등으로 38,614천원 감액

사업개요

○ 위    치 : 중구 예장동 5-84외 6개소

○ 공사내용 : 폐쇄저수조 철거 및 녹지복원, 약수터 정비

○ 사업기간 : 착공일로부터 120일간

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 건설산업기본법에 의한 조경공사업을 등록한 업체로서 주된 영업소 소재지가 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 서울시에 소재한 업체

○ 사업예산 : 314백만원(도급비 292, 관급비 3, 이전비 19)

- 남산및산하공원운영, 남산및산하공원시설물보수정비, 시설비

향후일정

○ ‘15. 11           : 공사발주 및 계약

○ ‘15. 12 ~ ’16.3 : 공사시행

붙임 : 설계내역서 1부(별도첨부).  끝.