문서번호	시설개선과-9928
결재일자	2015.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설개선과장	체육시설관리사업소장
이호연	이영교	신동호	11/14 이구석
협 조

조경관리 기간제근로자 채용기간 연장계획

2015. 11

체육시설관리사업소

(시설개선과)

조경관리 기간제근로자 채용기간 연장계획

양잔디 대체포지 정비작업 등으로 겨울 월동작업이 지체됨에 확보된 예산범위내에서 기간제근로자 채용기간을 연장하여 월동준비에 만전을 기하고자 함.

관련근거

❍ 2015년 조경관리 기간제근로자 채용계획(2015.2.2)

❍ 양잔디 대체포지 정비계획(2015.10.29)

❍ 잠실종합운동장 조경시설물 월동계획(2015.11.11)

기간제근로자 현황

❍ 인    원 : 20명 (남16, 여4)

❍ 채용기간 : 2015. 3. 2 ~ 11. 30

예산집행내역

❍ 총  예  산 : 406,860천원

- 지  출  액 : 300,686천원(11.13일 현재)

- 지출예정액 :  37,000천원(11월분 급여지급)

- 예산잔액 :  69,174천원

채용기간 연장

❍ 대상인원 : 19명(남15, 여4)

※ 총 20명 중 남 1명은 산재에 의한 요양 치료 중으로 대상에서 제외

❍ 기간 변경

- 당  초 : 2015. 3. 2 ~ 2015. 11. 30

- 변  경 : 2015. 3. 2 ~ 2015. 12. 18 (눈이 올 경우 종료시점 조정)

❍ 연장사유

- 양잔디 대체포지 정비작업 등으로 조경관리 사업분량이 증가함에 부득이 기간제근로자 채용기간을 연장 운영하여 지체된 월동작업(낙엽수거, 수목 짚싸기 등) 시행

- 탄천잔디포지 생산된 부숙퇴비 녹지대(관목, 지피식물)시비(20톤)

검토의견

❍ 기간제근로자 계약기간을 연장하여 월동준비에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 2015년 조경관리 기간제근로자 현황 1부.  끝.