문서번호	시설보수과-9565
결재일자	2015.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
조계진		정재현	11/16 노영석
협조

용역 설계변경(1회) 검토 보고

(2015년 도로시설물 세척용역)

2015. 11

북부도로사업소

(시설보수과)

용역 설계변경(1회) 검토 보고

(2015년 시설물세척용역)

동절기 세척 공백기간을 최소화하기 위한 추가작업을 실시하기 위해 낙찰차액 활용계획에 따라 예산 범위내에서 설계변경 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

용역현황

○ 용 역 명 : 2015년 도로시설물세척용역-북부

○ 용역금액 : 300,990,000원

○ 용 역 사 : ㈜ 잡플러스 최희용

○ 용역기간 : 2015. 4. 7. ~ 2015. 12. 31

세부 변경내용

○ 시행근거 : 도로시설물 안전성 확보를 위한 일상유지 포괄예산 미집행액(낙찰차액) 사용 계획 - 시설보수과8929(2015.10.26.)

○ 물량 변경(증.감) 내역

공 종	단위	당 초	변 경	증·감
터널세척	㎡	383,911	438,462	증)54,551
지하차도세척	㎡	107,954	144,533	증)36,579
청계천조형물	㎡	1,148	1.148	없음

○ 용역비 변경(증.감)내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비고
총용역비	300,990,000원	343,000,000원	증)42,010,000원
도급비	300,990,000원	343,000,000원	증)42,010,000원

○ 예산과목

- 도시개발특별회계, 도로시설관리, 터널시설관리, 도로시설물

(터널,복개,지하차도,세척)일상유지보수, 시설비(401-01)

조치의견

○ 동절기 세척공백기 최소화를 위한 낙찰차액 활용계획에 따라 설계변경 시행하고, 추가작업 지시하여 깨끗하고 안전한 시설물 유지관리에 최선을 다하고자 함.

-따로붙임 : 1.설계변경 내역서 1부.

2.낙찰차액 사용방침서 1부. 끝