투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(서울교 보수공사 개질아스콘 구매-강서)

우리 사업소에서 2015년 예산사업으로 추진중인 『2015년 서울교 보수공사 개질아스콘 구매-강서』 에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

가. 계약건명 : 서울교 보수공사 개질아스콘 구매 - 강서

나. 계 약 자 : 대신실업(주)  대표 선주성

다. 계약기간 : 2015. 6. 22. ~ 2015. 11. 30.

라. 계약금액 : 115,797,000원

마. 변경내역 : 당초 115,797,000원→변경 207,381,900원(증91,584,900원)

바. 설계변경사유 : 공사물량 증가로 인한 납품물량 증가와 일상유지보수공사 사용물량(신월IC, 광복교) 정산에 따른 계약내역 변경

사. 예산과목 :

1) 교량관리, 일반교량관리, 서울교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비 : 185,753,700원

2) 도로시설관리, 지하차도안전관리, 도로시설물운영, 터널시설관리, 도로시설물(터널,복개,지하차도)일상유지보수, 시설비: 21,628,200원

붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부

2. 설계변경 내역서 1부

3. 합의각서 1부.   끝.

주무관	윤동원		시설보수과장	박병연		강서도로사업소장	11/16 조병준
협조자	★계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-8976	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7976	/전송	02-2657-7950	/		/	대시민공개