투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 2015년 호안녹화조성지 유지관리공사 (강동)

1. 녹지관리과-4585(2015.11.06.)호 관련입니다.

2. 「2015년 호안녹화조성지 유지관리공사 (강동)」 건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

계 약 현 황	공 사 명	2015년 호안녹화조성지 유지관리공사 (강동)
	계약상대자	산하지기주식회사 (대표 : 최미경)
	계 약 일 자	2015.05.13
변 경 내 역	내 용	계약금액 변경 (감 5,833,000), 계약기간 변경 없음
	변경사유	물량증감에 따른 설계변경 및 보험료 정산
기 간 변 경	변경전 착공일자	2015.05.13	변경후 착공일자	2015.05.13
	변경전 준공기한	2015.11.30	변경후 준공기한	2015.11.30
금 액 변 경	변 경 전	*************
	변경금액	감 5,833,000 원
	변 경 후	251,636,000**

붙    임 :  1. 설계변경내역서 1부

2. 변경계약의뢰서 1부. 끝.

주무관	심옥경		총무과장	최대봉		총무부장	11/16 이상국
협조자
시행	총무과-19267	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	imok@seoul.go.kr	/	부분공개