투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 폐아스콘 운반 및 처리용역(1구역) 설계변경(1차) 시행

우리사업소에서 시행중인 『2015년 폐아스콘 운반 및 처리용역(1구역)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차)을 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2015년 폐아스콘 운반 및 처리용역(1구역)

나. 용역기간 : 2015.04 .08 ~ 2015. 12. 31.(변경없음)

다. 계약금액 : 202,804,630원

라. 도 급 자 : (유)도성개발 대표 유칠중

마. 설계변경사유

- 노후포장도로 정비 하반기 예산 추가 재배정으로 발생량 증가

바. 설계변경내역

- 공사비 변경                                         (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비 고
총용역비	202,804,630	277,552,000	증)74,747,370
도 급 비	202,804,630	277,552,000	증)74,747,370

사. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부. 끝.

★주무관	김용면		도로보수과장	국중진		성동도로사업소장	11/16 이종엽
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-5060	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2210-1566	/전송	02)2210-1549	/		/	대시민공개