투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	물재생과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 안내-관급자재 구매(레미콘-2처리장 유량조정 및 침전조 설치공사)

물재생과-7119-(2015.10.29)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약을 체결하였음을 보고합니다.

1. 계약건명 : 관급자재 구매(레미콘-2처리장 유량조정 및 침전조 설치공사)

2. 계약금액 : 금4,518,800월(금사백오십일만팔천팔백원)

(조달수수료 별도 : 금23,180원)

3. 계 약 일 : 2015년  10월 29일

4. 변경내역

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
기한연장	2015.10.30	2015.12.20	증) 51일
금액변경	금17,660,430원	금4,541,980원	감) 금13,118,450원

5. 계약사유 : 설계변경에 따른 수량 변경

6. 계약업체 : 서울경인레미콘공업(협) (대표:배조웅)

*****************

붙임 : 분할납품요구및통지 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	정상진		관리과장	한병연		중랑물재생센터소장	11/16 김동기
협조자
시행	관리과-15800	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	jungsj0318@seoul.go.kr	/	부분공개