문서번호	정보공개정책과-21970
결재일자	2015.11.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기록문화팀장	정보공개정책과장
김보인		문인환	전결 11/16 조영삼
협조

서울기록화 사료관리시스템 구축 · 시정 사진기록 정리 및 콘텐츠 발굴 사업 주 간 업 무 보 고

행정국

(정보공개정책과)

서울기록화 사료관리시스템 구축 · 시정 사진기록 정리 및 콘텐츠 발굴 사업

주  간  업  무  보  고(11주차)

사업개요

1. 서울기록화 사료관리시스템 구축 사업

○ 사업기간 : 2015.8.28.~12.31

○ 사 업 비 : 92,600천원

○ 수행기관 : 한국문헌정보기술(주) (PM:문병준)

2. 시정 사진기록 정리 및 콘텐츠 발굴 사업

○ 사업기간 : 2015.8.28.~12.31

○ 사 업 비 : 159,000천원

○ 수행기관 : ㈜알엠소프트 (PM:윤정훈)

추진기간 : 2015.11.9.~2015.11.15

추진실적

1. 서울기록화 사료관리시스템 구축 사업

<사업관리>

○ 11.12 사업 진행 상황 관련 회의(과장 외 5인)

- 붙임 회의록 참고

<분석>

○ 관리시스템 기능 개발 현황

- 등록/사진등록, 열람, 검색, 통계 : 진행중

- 공개관리, 서비스관리, 시스템관리 : 완료

2. 시정 사진기록 정리 및 콘텐츠 발굴 사업

<사업관리>

○ 11.12 사업 진행 상황 관련 회의(과장 외 5인)

- 붙임 회의록 참고

<업무보고>

○ 시정사진기록 DB 정리

- 주간실적(5일): 공정률 6%

Task 실적	분류/기술			검수
	색인등록	내용기술	분류	1차	2차
실적건수	16,728	16,728 (20,959 초과)	0	0	0
실적률	16.7%	42.6% (41.9% 초과)	0%	0%	0%

- 누적실적(27일): 공정률 70%

Task 실적	분류/기술			검수
	색인등록	내용기술	분류	1차	2차
실적건수	87,687	87,687 (37,367초과)	20,000	20,000	0
실적률	87.7%	175.4% (75.4%초과)	20.0%	20.0%	0%

○ 시정 콘텐츠 발굴

- 콘텐츠 발굴

· 테마별 시정사진 선별

· 테마별 소개문구 작성

- 콘텐츠 에피소드 제작

· 콘텐츠 제작방향 설정 : 3분길이 UCC제작

향후계획

1. 서울기록화 사료관리시스템 구축 사업

<사업관리>

○ 11.16 정보소통광장 연계 관련 실무 회의

2. 시정 사진기록 정리 및 콘텐츠 발굴 사업

<사업관리>

○ 주제분류체계 수립

※ 붙 임

1. 서울기록화 사료관리시스템 구축 사업 주간업무 보고서(11주차) 및 사업진행상황 관련 보고(11/12) 회의록 각 1부.

2. 시정 사진기록 정리 및 콘텐츠 발굴 사업 주간업무 보고서(11주차) 및 사업진행상황 관련 보고(11/12) 회의록 각 1부.