함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	실정보고에 따른 검토결과 회시(가리봉동 2175∼12144 외 3개소)

1. 공사감독2처18117(2015.11.09)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 보고한“가리봉동 2175∼12144 외 3개소 세척갱생관 정비공사”의 실정보고에 대한 검토결과를 아래와 같이 회시하오니 공사 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 회시내용

연번	공단 실정보고 내용	공단 조치의견	검 토 결 과
1	(2구간 기존관 철거 연장 감소)○횡단굴착구간 결과 시·종점부130m를 제외한 나머지 530m구간의 기존관 대부분이 중앙차선 및 보도상에 위치하고 있어 차량통제 및 영업방해로 철거가 불가한 실정임.(당초 철거계획 연장 30m)	○공사구간 시·종점부 30m는 철거 조치하고 나머지 450m구간은 폐쇄 조치코자 하며 이로인해 변동되는 시공물량은 설계변경에 반영 조치(개략공사비 감액 894천원)	○관로 정비공사 시 기존관로는 철거조치가 원칙인 바 현장여건이 가능시 최대한 철거 조치하고 변동되는 시공물량은 추후 설계변경시 반영바랍니다.

끝.

	강서수도사업소장
★주무관	이용호		급수운영과장	11/16 代유명은
협조자	주무관	이상무
시행	급수운영과-28420	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3949	/전송	02-3146-3989	/	l*********3@seoul.go.kr	/	대시민공개