문서번호	토목부-24141
결재일자	2015.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
강철규		권혁대	11/16 노우성
협 조
	교통개선팀장			유승효
	교량건설과장			이동훈

서울역주변 교차로 개선공사

통합 감리용역 시행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.11.

도시기반시설본부

(토  목  부)

서울역주변 교차로 개선공사

통합 감리용역 시행계획 보고

서울역 7017 프로젝트와 관련하여 시행중인「서울역주변 교차로 개선공사」의 감독업무 수행을 “서울역 7017프로젝트 감독 권한대행 등 건설사업관리용역”에  통합하여 시행을 위한 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 서울역주변 교차로 개선사업 시행 요청 (교통운영과-12593호:`15.6.30)

○ 공사감독 위탁 요청에 따른 회신 (시설관리공단 공사감독2처-15249:`15.9.22)

- 금년도 추가 공사감독 수탁 불가함(현 공사감독 수행건수 과다)

Ⅱ		사업개요

○ 위    치 : 서울역 주변(5개) 교차로 및 가로

○ 규    모 : 교차로 및 가로 개선 4개소, 삼거리 신설 1개소

○ 공사기간 : '15. 10. ~ '15. 12.

○ 총사업비 : 26.1억원 (공사비 12억원, 폐기물, 이설비 등 14.1억원)

○ 시 공 사 : 유호산업개발㈜     ○ 설 계 사 : ㈜서우TEC

Ⅲ		추진현황

○ '15. 8.  7.  : 공사 계약

○ '15. 8.10. ~ 9.30. : 현황측량 및 지장물 이설 협의

○ '14.10. 1.~ 11.10. : 염천교사거리 및 중림동삼거리 교차로 개선

- 시설관리공단의 위탁감독 수행불가 회신에 따라 부득이 직접 감독시행

※ 현재 3개소 교차로(서울역, 숙대입구, 숭례문)의 교통규제심의가 미완료되어 공사 대기중

Ⅳ		감독업무 수행방안 검토

○ 현황 및 문제점

- 본 공사감독을 우리시 시설관리공단에 위탁 요구하였으나, 공사감독 수행건수 과다로 추가 수탁이 불가하다고 회신됨에 따라, 불가피하게 2개소 교차로(중림동, 염천교)의 개선공사(보도축소 및 차도확장)는 직접 감독 수행함.

- 서울역교차로는 교통량이 매우 많고 복잡한 교차로이며, 통일로와 퇴계로를 직접 연결하는 차로 확보 등 차로 재구획(중앙분리대 철거 및 버스전용차로 차선 조정 등)이 필요하며, 도심지의 교통불편 최소화를 위해 야간공사를 시행하여야 하는 실정임.

- 또한, 교통운영과에서 설계(완료)된 교차로 개선계획(공사발주)에 대하여 경찰청 검토결과 보완할 사항 등은 공사중 설계변경이 필요하나, 기술적인 사항에 대하여 직접 검토하기도 어려운 실정이며, `15. 10. 29. 계약된 서울역 7017프로젝트 건설사업관리 용역은 본 공사 완료 후에 사업 추진할 수 있는 실정임.

○ 감독업무 수행 방안

- 본 공사는 공사비 200억 미만으로 “건설진흥법 시행령 제55조”에 따라 건설사업관리용역 대상이 아니나 복잡한 도심지내 교통 통제후 단시일내에 공사완료를 위해 주․야로 공사를 시행하여야 하고 복잡한 교차로의 차로 신설 및 버스전용차로 조정 등의 공사가 포함된 복합공종으로 품질관리, 안전관리 및 공정관리를 위하여 건설사업관리를 시행하는 것이 필요함.

- 본 공사는 서울역 7017 프로젝트와 연계된 사업으로써, 본 공사 완료 후에 서울역고가 교통통제 등의 사업을 추진할 수 있으므로, 서울역 7017 프로젝트 감독권한대행 등 건설사업관리 용역에 본 공사감독 업무를 포함 시행코자 함.

○ 감리비 예산 확보방안

- 소요예산 : 3,400만원

· 투입인원 : 감리사 2명(고급 1, 중급 1 : 주·야간 공사)

- 예산과목 : 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통정보 제공 및 교통흐름개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통소통개선, 감리비(401-02)

· 상기 예산으로 감리기간중 실투입 인원에 따라 정산처리

Ⅴ		조치계획

○ '15.11.   : 경찰청 교통규제 심의 완료 후 공사 착수

- 서울역교차로, 숙대입구교차로 개선, 숭례문교차로 신설 공사

- 공사기간 : 공사 착수일로 부터 35일(절대공기)

- 감리기간 : 공사 착수전 3일부터 공사 완료 후 7일 (45일)

○ '15.12.   : 시설공사 완료

붙임 : 1. 사업설명서 1부.

2. 감리용역대가 산출서 1부.

3. 관련문서 사본 1부.  끝.