함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 심의위원회 개최 (2015년 북부수도사업소관내 배수지 항청소 용역)

1. 우리사업소에서 시행한 「2015년 북부수도사업소 관내 배수지항청소 용역(단가계약)」에 대하여 보험료(건강,노인장기요양,국민연금) 정산에 따른 감액으로 설계변경사유가 발생하여 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 북부수도사업소 관내 배수지항청소 용역(단가계약)

나. 공사개요 : 청소면적 – 297,472㎡(8개 배수지)

다. 계약기간 : 2015.04.21 ~ 2015.11.30

라. 도 급 비 :

○ 당초 : ************

○ 변경 : ************

마. 계 약 자 : 주마건설(주) 대표 신경기

바. 심의회개최

○ 심의일정 : 2015.11.16.(월) 17:00

○ 심의장소 : 급수운영과

○ 심의위원장 : 급수운영과장

○ 심의위원 : 시설6급 이승완, 시설7급 김종필, 시설7급 유광창, 시설7급 이한수              사. 심의 내용

○ 계약물량 증감 및 보험료에 따른 설계변경 사항

○ 위 사항을 검토 및 심의하고 심의결과에 의거 설계변경 조치

첨부 : 1. 변경 내역서  1부.

2. 수량 산출서  1부.

3. 설계변경 사유서 1부. 끝.

주무관	최용진		급수운영과장	11/16 김수영
협조자	주무관	이한수		주무관	유광창		지방시설사무관대우	이승완
주무관	김종필토
시행	급수운영과-22167	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개