문서번호	설비부-14325
결재일자	2015.11.16.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
박병환		김영수	11/16 박기형
협 조

『서울역 주변 교차로 개선 전기공사』관련

전기설계용역 보완 발주계획 보고

2015. 11

도시기반시설본부

[설 비 부]

『서울역 주변 교차로 개선 전기공사』관련

전기설계용역 보완 발주계획 보고

「서울역 주변 교통체계 개선사업」관련 교통운영과로 부터 전기공사설계용역 보완 요청에 따른 발주계획 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 서울역주변 교차로 개선사업에 따른 보완요청

(설비부-13971호, 2015.11.10)

○ 서울역주변 교차로 개선 전기공사 관련 설계용역 시행요청

(교통운영과-21994호, 2015.11.12.)

Ⅱ		사업개요

○ 위    치 : 서울역교차로, 숭례문 삼거리, 중림동교차로, 염천교차로,                  숙대입구교차로 등

○ 공사개요

- 서울역교차로 차량신호등 설치 9조, 다기능 무인단속카메라 2대 신설

- 숭례문삼거리 차량신호등 설치 6조

- 중림동교차로 차량신호등 설치 1조, 가로등 4본 이설

- 숙대입구교차로 차량신호등 설치 1조, 가로등 4본 철거

- 염천교 가로등 4본 이설

○ 사업기간 : 착수일로부터~ 2015.12.31.

○ 소요예산 : 개략6,149천원

Ⅲ		추진경위

○ `15.07.27. : 서울역주변 교차로개선사업 설계도서 보완요청

○ `15.08.18. : 설계보완 제출(교통운영과)

○ `15.09.10. : 전기공사 발주

○ `15.09.10. : 계약 및 착공

○ `15.11.10. : 서울역주변 교차로 개선사업에 따른 보완요청

○ `15.11.12. : 전기공사 관련 설계용역 시행요청(교통운영과)

Ⅳ		보고내용

○「서울시 교통신호기공사 업무처리 가이드라인」과 관련 교통신호기        설계는 건설 교통 및 전기설계면허 등록업체에서 수행해야 가능하나

○ 본청 교통운영과에서 계약된 용역업체(서우TEC)는 건설 교통분야 만 있고,       전기설계면허가 없는 관계로 전기설계용역을 별도 발주해야 함.

Ⅴ		설계용역 발주계획

○ 교통신호기 전기설계용역 자격 조건

분 야	구 분	자 격 기 준	비 고
설 계	면 허	전력기술관리법 제14조 규정에 의거 “전력시설물의 설계업”을 등록한 자. 엔지니어링기술진흥법 제21조 규정에 의거 건설부분의 교통전문분야(교통기술사보유)로 신고한자
	실 적	- 교통신호제어시스템 설치공사 실시설계용역의 수행(준공) 실적 최근10년간 5천만원이상(누적합계액) 보유한 업체 (단, 공사비 추정가격 3억미만은 실적제한 폐지) ※ 최근 10년간 실적은 설계용역비 추정가격의 0.7배이내

○ 계약방법

- 수의계약

· 대상업체 : 대영유비텍㈜  대표자 조근환 (☎02-2633-5839)

· 주    소 : 서울 금천구 벚꽃로 234 에이스하이엔드타워6차 7층

- 관련근거 :「지방자치를 당사자로하는 계약」에 관한 법률 시행령               제25조 제1항 제5호(용역 추정가격 5,000만원 이하)

- 수의계약 사유

· 설계용역비가 소액(보완 설계비: 6,149천원)이고, 또한, 상기 자격     을 갖춘 아래 업체와 수의계약 하고자 함.

Ⅵ		보고자 의견

○ 서울역 교차로 교통신호기 개선 사업을 긴급히 추진하기 위해

기술용역타당성 심의 후 수의계약하여 공정관리에 최선을 다하고자       합니다.

Ⅶ		향후계획

○ 2015.11. : 기술용역타당성 심의요청(기술심사담당관)

○ 2015.12. : 준 공.

붙임 : 1. 관련공문서 1부.

2. 설계용역비 산출내역서 1부. 끝.