투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	지체상금 부과 (서울상상나라 건립공사)

1.  건축부-13379(‘12. 11. 26)호 및 건설총괄부-3191(2013.2.19.)와 관련입니다.

2. 서울상상나라 건립공사 준공검사 결과 및 준공정산과 관련하여 아래와 같이 지체일수에 대한 지연배상금을 부과하고자 합니다.

가. 공사개요

○ 공 사 명 : 서울상상나라 건립공사

○ 도 급 자 : (주)삼부종합건설, 영안건설(주)

○ 준공금액 : (3차)7,955,661,440원(총차 22,436,270,000원)

※ 지하주차장 등 임시사용승인 금액 : 1,267,308,000원

○ 공사기간 : (3차)‘12.3.21~’12.9.20(총차 ‘10.6.28~’12.9.20)

○ 준공검사 추진 경위

- ‘12. 9. 20 ~ 10. 11 : 1차 준공검사(불합격)

- ‘12.10.13 : 준공검사결과 및 지체상금 배상통보(책임감리단→시공사)

- ‘12.10.25 : 준공검사결과 보완 완료 제출(시공사→책임감리단)

- ‘12.10.25~26 : 2차 준공검사(합격)

나. 지연배상금 부과

- 지연배상금 계산법 : 지연배상금 = 계약금액×지체일수×지연배상금율

- 지연배상금 : 6,688,353,440원×15일×1/1000 = 100,325,300원

- 부과방법 : 고지서에 의한 납부(세입세출외 현금 보관중)

붙임   고지서 1부(별첨).  끝.

주무관	진종권		경리과장	최영미		건설총괄부장	01/14 강홍기
협조자
시행	건설총괄부-855	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관2동3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2327	/		/	대시민공개