	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	승강기 설치공사 준공에 따른 지체상금 세입징수결의

1. 관련근거

가. 소방행정과-16828호(2015.11.17.)『승객용 승강기 설치공사 준공정산 및 지급결의』

나. 행정자치부 예규 제27호(2015.10.1.) 『지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 공사계약일반조건 제8절 계약이행의 지체와 계약의 해제·해지 1의 바호』

2. 위와 관련 우리서 승객용 승강기 설치 완료에 따른 정산후 지체상금에 대하여 아래와 같이 세입조치코자 합니다.

가. 건    명 : 구로소방서 승객용 승강기 공사 지체상금

*********************

나. 준공기한 : 2015. 9. 21.

다. 지연일수 : 44일 (2015. 9. 22. ~ 11. 4. 검사완료일까지)

라. 계약금액 : 금43,288,970원(금사천삼백이십팔만팔천구백칠십원 정)

마. 세입일시 : 2015. 11. 18.(수)

바. 세입금액 : 금2,857,070원(금이백팔십오만칠천칠십원 정)

※ 산출내역 : 43,288,970원 × 1,000/1.5 = 2,857,070원

사. 세입방법 : 수납고지서 출력후 e호조를 통한 전용계좌 납부

아. 세입과목 : 세외수입/임시적세외수입/기타수입/위약금 및 지체상금

(10-228301).  끝.

담당자	김현태		장비회계팀장	천완주		소방행정과장	代김정수		소방서장	11/17 김송연
협조자
시행	소방행정과-16840	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 소방행정과	/
전화	2618-3103	/전송	2616-1919	/	act02@seoul.go.kr	/	부분공개(6)