소방정보ㆍ통신장비 구입설치(공사) 감독일지
전산통신과-6269				담당자	정보통신팀장	전산통신과장	결재
				남성의	주종옥	11/17 강경철
공정 내용	진척공정	36.4%	진척주요추진사항
	금주공정	36.4%	금주주요 추진사항	- 케이블 공사 - H/W 장비 입고 및 설치
◎ 금주 작업내용 (~11.13) ▪ 사업관리 - ▪ 하드웨어 - 서버, 스토리지, L3스위치, L2스위치, 서버랙, 인코더, 디코더 입고 - VDA 장비 센터 설치 - 인코더, 디코더 장비 센터 설치 ▪ 소프트웨어 - 영상공유/영상관리 소프트웨어 기본 개발 마무리 - 재난영상공유 UI 디자인 확정 / 개발 진행 - 중앙관제 소프트웨어 IP 매트릭스 기능 개발 진행 / 상황판 소프트웨어 통합 진행 ▪ 설치공사 - 케이블 설치 공사 수행 (센터내 광케이블, 동축케이블, UTP케이블 설치) - 전기배선공사 및 UPS 설치 - 강화유리 현장 실사 및 발주
금주투입인원 - 정보통신팀 : 소방교 남성의 - (주)에스디시스템 : 이호근 부장, 고진현 과장, 구성모 팀장, 안재원 과장, 박광순, 김지상
◎ 특기사항 - 지하공동구 연계 장비 (스트리밍 서버) 발주 : 11월 말 입고 및 설치 예정 - 주요 하드웨어장비 입고 ◎ 차주 업무예정 - 주요하드웨어장비 (서버, 스위치, 스토리지, 인코더, 디코더, 방화벽) 입고 및 설치 예정 - 영상관제대 강화유리 교체작업 예정 - 케이블 설치 공사 - 영상관제대 강화유리 교체예정