서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(1회) 시행(한남대교 정밀안전진단 및 정밀점검 용역)

1. 교량안전과-1648(2015.9.24.)호와 관련입니다.

2. 안전총괄본부 교량안전과에서 시행중인 「한남대교 정밀안전진단(상류교) 및 정밀점검(하류교) 용역」의 설계변경(1회)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 한남대교 정밀안전진단(상류교) 및 정밀점검(하류교) 용역

나. 용역기간 : 2015.6.18.~2016.1.13

다. 도 급 자 : (재)한국재난연구원 외 1개사 대표 윤영조

라. 설계변경 내역(1회 변경)

구 분		당 초 금 액(원)	변 경 금 액(원)	증․감(원)	비 고
총 용 역 비		253,950,000	256,160,000	증) 2,210,000
도급비	공 급 가 액	229,954,546	232,327,273	증) 2,372,727
	부 가 가 치 세	22,995,454	23,232,727	증) 237,273
	기 술 자 문 비	1,000,000	600,000	감) 400,000
	계	253,950,000	256,160,000	증) 2,210,000

마. 설계변경 사유

- 이정․방향․노선 표지주 점검 추가과업(반포,잠실대교)에 따른 내역변경

- 기술자문비 정산(자문위원 10명→6명)

바. 예산과목 : 안전총괄본부 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물 안전점검 및 진단, 시설비

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 관련방침서 1부.  끝.

주무관	최원혁		강구조교량팀장	류봉현		교량안전과장	11/17 이용심
협조자	계약1팀장	김점선
시행	교량안전과-5028	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-1964	/전송	02-2133-1429	/		/	대시민공개