서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울지방국토관리청장(하천계획과장)
(경유)
제목	하천점용 허가 준공인가 지연신청 사유제출

1. 서울시 물순환정책과-4772(2015.11.17)호 관련입니다

2. 위 호로 하천점용 허가 준공인가 신청한 아래지역의 준공기한(2010. 12. 24.) 지체하여 준공인가 신청한 사유를 제출합니다

가. 점용시설 : 통행제한 안내판(한강교량)

나. 위    치 : 올림픽대로, 강동구 천호동 343-2호, 350-2호, 2개소

다. 용    도 : 광진교,천호대교,올림픽대교 통행제한 안내간판

라. 준공인가 지연 신청 사유 : 담당자의 업무착오로 공사착공 전 하천점용 허가 승인으로 모든 하천점용 절차가 완료되는 것으로 오인하여 당시 준공인가 미 신청

붙임 : 1. 하천구역 편입 토지조서 1부.

2. 위치도 및 준공사진 2부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김근수		수질수생태팀장	정미선		물순환정책과장	11/17 최진석
협조자
시행	물순환정책과-4838	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-3767	/전송	02-2133-1041	/	kksu49@seoul.go.kr	/	대시민공개