서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	(주)한국건설관리공사 책임건설사업관리기술자 정의헌
(경유)
제목	작업기한 연기요청에 대한 승인 통보(제14차)

1. ㈜한국건설관리공사 1종교량-249호(2015.11.16.)

2. 위 대호로 제출한 『2015 도로시설물 일상유지보수공사(강북)』의 작업지시(제14차) 연기요청 검토의견서에 대하여 아래와 같이 승인 통보 하오니 공사 추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 작업지시 변경승인

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
14차 작업지시	공사기간	착수일로부터~ 2015. 11. 15	착수일로부터~ 2015. 11. 30	공사기간중 우천으로 인한 품질확보의 어려움.
	작업시간	주 간	주 간

끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	배상현		강북일반교량팀장	손창익		교량안전과장	11/17 이용심
협조자
시행	교량안전과-4960	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울특별시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1970	/전송	02-2133-1429	/	yamato78@seoul.go.kr	/	대시민공개