문서번호	토목부-745
결재일자	2014.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도시고속도로과장	토목부장
장영준	성선주	01/14 노우성

실정보고 검토보고

- 월계2교외 1개소 교량확장공사 -

2014. 1

토목부

실정보고 검토보고

(워터젯 파쇄두께 변경 외 4건)

월계2교외 1개소 교량확장공사와 관련하여 워터제트 두께조정 외 4건의 현장 실정보고에 대한 검토 보고임

※ 관련근거 : 실정보고(워터제트 두께 조정 외 4건, 공사감독1처-9753, ‘13.12.17)

□ 공사개요

◦  위    치 : 노원구 월계동 860-7(월계로)

마포구 성산동 56(월드컵북로)

◦  규    모

- 월계2교 : 차도및보도확장(폭 25 → 29m, L=35m)

- 성산2교 : 보도확장(폭 30 → 33m, L=33.4m)

◦  사업기간 : 2013.5.27. ~ 2014.5.26

◦  총사업비 : 1,876백만원

◦  도급사 : ㈜엠제이티

□ 보고내용

1) 워터젯 파쇄두께 변경(월계2교)

○ 내용 : 당초 설계시 워터젯 파쇄두께가 T=200mm로 설계되었으나(도면) 설계내역서에는 T=100m로 적용되어 도면에 맞게 T=200mm로 변경

○ 수량 증.감

공 종		단 위	당 초	변 경	증 ․ (감)	비고
워터젯 파쇄공사
	워터젯 파쇄	㎡	186	372	186
	콘크리트 파쇄면 청소	㎡	186	372	186
	물막이 공사	㎡	155	310	155

○ 공사비 증.감

(단위: 원)

비 목	당 초	변 경	증 ․ (감)	비 고
총 공사비	92,157,388	184,407,707	92,250,319
순공사비	65,321,994	130,643,991	65,321,997
제잡비	26,835,394	53,763,716	26,928,322

2) 워터젯 파쇄두께 변경(성산2교)

○ 내용 : 당초 설계시 워터젯 파쇄두께가 T=60mm로 설계되었으나(도면) 설계내역서에는 T=100m로 적용된 오류가 확인됨. 기존철근과 연결위한 필요두께 확보를 위해 파쇄두께를 T=100mm로 변경하여 시공코자함

⇒ 금액변경 없음

3) 강관동바리 및 가도공 삭제(월계2교)

○ 내용 : 당초 설계는 강관동바리 및 가도공 설치가 계획되었으나, 교량 구조검토 결과 캔틸레버 무지보공으로 시공가능하여 강관동바리, 가도공 삭제

○ 수량 증.감

공 종		단 위	당 초	변 경	증 ․ (감)	비고
강관동바리
,	강관동바리	㎥	868	-	(868)
	수평연결재	㎥	326	-	(326)
가도공
	흙쌓기및헐기	㎥	180	-	(180)
	PP마대쌓기및헐기	㎡	86	-	(86)
	가배수관부설(흄관)	m	176	-	(176)
	토사	㎥	252	-	(252)
	흙운반	㎥	258	-	(258)

○ 공사비 증.감

(단위: 원)

비 목	당 초	변 경	증 ․ (감)	비 고
총 공사비	95,647,085	0	(95,647,085)
순공사비	58,960,196	0	(58,960,196)
제잡비	36,686,889	0	(36,686,889)

4) 케미컬앵커 길이 변경(성산2교)

○ 내용 : 당초 강재브라켓 케미컬 앵커길이가 M20×460L로 설계되었으나, 브라켓(T=140mm)과 슬래브(250mm)의 두께인 390mm이하로 길이변경이 필요하여 M20×360L로 변경시공코자 함

○ 수량 증.감

공 종		단 위	당 초	변 경	증 ․ (감)	비고
브라켓 제작설치
	케미컬앵커 (M20×460L)	개	222	-	(222)
	케미컬앵커 (M20×360L)	개	-	222	222

○ 공사비 증.감

(단위: 원)

비 목	당 초	변 경	증 ․ (감)	비 고
총 공사비	3,629,432	2,770,334	(859,098)
순공사비	2,886,000	2,220,000	(666,000)
제잡비	743,432	550,334	(193,098)

5) 콘크리트 강도 변경(월계2교, 성산2교)

○ 내용 : 당초 워터젯 파쇄 후 고강도 60Mpa의 무수축 콘크리트로 타설하도록 설계되었으나 현장배합으로 시공이 난해하고, 24Mpa~27Mpa 강도의 콘크리트를 타설하여도 교량의 안전성에 문제가 없다고 판단되어 콘크리트 강도 변경

○ 수량 증.감

[월계2교]

공 종		단 위	당 초	변 경	증 ․ (감)	비고
무수축콘크리트(60MPa)
	무수축콘크리트 타설	㎥	37.2	-	(37.2)
	포대시멘트 운반	대	339	-	(339)
	보통시멘트	대	339	-	(339)
	모레	㎥	18	-	(18)
	쇄석자갈	㎥	23	-	(23)
콘크리트 타설(24Mpa) (레미콘)		㎥	13	50	37

[성산2교]

공 종		단 위	당 초	변 경	증 ․ (감)	비고
무수축콘크리트(60MPa)
	무수축콘크리트 타설	㎥	11.53	-	(11.53)
	포대시멘트 운반	대	105	-	(105)
	보통시멘트	대	105	-	(105)
	모레	㎥	5	-	(5)
	쇄석자갈	㎥	7	-	(7)
콘크리트 타설(27Mpa) (레미콘)		㎥	23	42	19

○ 공사비 증.감

(단위: 원)

비 목	당 초	변 경	증 ․ (감)	비 고
총 공사비	17,181,603	6,851,825	(10,329,778)
순공사비	11,373,985	4,739,696	(6,634,289)
제잡비	5,807,618	2,112,129	(3,695,489)

□ 공사비 증감현황(합계)

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ (감)	비 고
총 공사비	208,615,508	194,029,866	(14,585,642)	실정보고 부분

□ 조치의견

○ 감리의 실정보고 내용을 검토한바 타당하므로 추후 설계변경에 반영하여 정산하고자 합니다.

첨부 :  감리 검토의견서(실정보고) 1부. 끝.