문서번호	물재생과-7638
결재일자	2015.11.18.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
김석수		강병수	11/18 김동기
협조

제2처리장 계면측정기 자동제어설비 구축 공사

계약변경 시행 보고

2015. 11.

중랑물재생센터

(물재생과)

제2처리장 계면측정기 자동제어설비 구축 공사 계약변경 시행 보고

제2처리장 계면측정기 자동제어설비 구축 공사 건과 관련하여 아래와 같이 계약변경 사유가 발생 계약기간을 변경하고자 함.

Ⅰ		계 약 현 황

□ 계약건명

- 제2처리장 계면측정기 자동제어설비 구축 공사

□ 계약업체

- ㈜이일엔지니어링 대표 : 정찬명

□ 계약기간

- 계 약 일 : '15.10.20.

- 납품기한 : '15.11.18.

□ 계약금액

- 금54,956,900원(금오천사백구십오만육천구백원)

Ⅱ		계약 변경 내용

□ 변경사유

- 재2처리장 계면측정기 자동제어설비 구축 공정(8대)은 완료되었으나, 제3처리장 종침 B계열 계면측정기 자동제어설비 구축 공정(2대)는 타공사(제3처리장 종침 사이폰식 슬러지수집기 개량공사)의 제3처리장 종침B계열 구간 개량공사 종료 후 통신설비 설치 제반여건이 갖추어진 후 진행되어야함.

□ 변경내역(계약기간변경)

구분	계약건명	공사기한	계약금액	비고
당초	제2처리장 계면측정기 자동제어설비 구축 공사	2015년 11월 18일	금54,956,000원
변경		2015년 11월 30일

Ⅲ		행 정 사 항

□ 계약변경 시행(합의서 작성).  끝.