문서번호	설비부-14506
결재일자	2015.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
지장환		이달영	11/18 박기형
협조

『구리암사대교 건설 전기공사』

유관기관 요구사항 반영 등 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『구리암사대교 건설 전기공사』

유관기관 요구사항 반영 등 설계변경 검토 보고

우리 본부에서 시행중인『구리암사대교 건설 전기공사』와 관련하여 책임감리단에서 유관기관 요청사항 반영 등 설계변경에 따른 실정보고를 하여 검토 보고 드림.

Ⅰ. 공사개요

□ 공 사 명 : 구리암사대교 건설 전기공사

□ 공사규모 : 가로등 설치 604본, 경관조명 설치 1식

□ 공사기간 : 2010. 07. 28 — 2015. 12. 31

□ 도 급 액 : 4,038,310 천원(4차 817,817 천원)

□ 시 공 사 : ㈜모범전설

□ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

Ⅱ. 관련근거

□ 암사감리 2014-246호 유관기관 회의 결과

- 강변북로 배너걸이 설치

□ 암사감리 2014-432호 유관기관 회의 결과

- 경관조명 및 본선교량 가로등 수신기 추가설치

□ 토목부-22765(2015.10.29.) : 설계변경반영 및 일부공정차수 내역 조정

Ⅲ. 검토 내용

□ 요구사항 반영

- 강변북로 및 구리한강 시민공원 진입로 가로등 배너걸이 설치

- 경관조명 및 본선교량 가로등 분전반 수신기 추가설치

□ 가로등 공사 등 물량 일부 조정(4차분 → 5차분)

- N도로 가로등 설치는 토목공정 미 착공으로 설치시기 조정

- 아천IC 구간 운영부서 미 지정에 따른 가로등표찰 설치시기 조정

□ 강변북로 이설 가로등 기초 재사용으로 물량 정산

□ 주요변경 내용

- 물량증․감

( 단 위 : 천원 )

공 종	품 명	규 격	단위	수 량		금액증․감 (직접공사비)	비 고
				당초	변경
가로등설치공사 (구리방면)	중공 기초	12m용	개	92	84(감 8)	감 2,042
	배너걸이	양방향, 세로형	개	-	16(증 16)	증 1,661
		양방향, 일반형	개	51	59(증 8)	증 383
		양방향, 세로형 (재사용)	개	72	-	증 309	설치비
	수신기	단방향	개	-	1(증 1)	증 335
경관조명 설비	수신기	양방향	개	-	4(증 4)	증 5,288
가로등설치공사 (암사방면)	수신기	양방향	개	-	2(증 2)	증 2,645
소 계						증 8,579

- 차수내역 변경(4차 → 5차)

( 단 위 : 천원 )

공 종	변 경 내 용	금 액	비 고
가로등설치공사(구리방면)	N도로 가로등 설치 1식 아천IC구간 가로등 표찰 설치 1식	16,470	간접비 포함

Ⅲ. 감리단 검토의견

□ N도로의 토목공사 미 착공과 아천IC구간의 유지관리기관 미 지정으로, 가로등 공사 및 표찰설치는 4차공사에서 5차공사로 조정함이 타당하며

□ 유관기관 요청 사항 반영 등 설계변경에 대한 검토결과 적정함

Ⅳ. 보고자 의견

□ 감리단 검토결과 적정한 것으로 판단되므로, 실정보고 사항을 승인하여 향후 설계변경시 계약금액이 변경될 수 있도록 감리단에 통보하고자 함.

붙임  1. 감리단 실정보고 공문 및 관련도서 각1부. 끝.