투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	선진종합건설(주) 대표 이정현
(경유)
제목	곰사 환경개선공사 보험료 정산 합의통보

곰방사장 환경정비를 위한 『서울대공원 곰사 환경개선공사』의 보험료 정산에 따른 도급액 정산 합의를 아래와 통보합니다.

가. 공 사 명 : 서울대공원 곰사 환경개선공사

나. 공사내용 : 곰사 방사장 및 관람공간 재정비 등

다. 공사기간 : 2015.2.23 ~ 2015.10.31

라. 시 행 사 : 선진종합건설(주) 대표 이정현

마. 도급금액(정산)

(단위 : 원)

구 분	변경전	변경후	증 감	비고
준공금액 (정산)	\1,067,288,000	\1,065,371,000	감 \1,917,000

바. 정산사유 : 미사용 보험료(건강,연금,노인장기보험료) 정산에 따른 감액 정산

붙임   합의각서 1부.  끝.

	서울대공원장
주무관	호명옥		조경과장	11/18 강인호
협조자
시행	조경과-6109	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7551	/전송	02-500-7993	/		/	부분공개(7)