서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	성북구청장(복지정책과장)
(경유)
제목	2015년 종합사회복지관 기능보강사업 변경 검토결과 통보

1. 성북구 복지정책과-26053(2015.11.6.), 시 복지정책과-11944(2015.11.18.) 관련입니다.

2. 2015년도 기능보강사업 추진과 관련하여 사업계획 변경 요청에 대하여 검토 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 대    상 : 성북구 길음종합사회복지관

나. 변경사업 : 천장석면텍스 교체 및 철거

다. 변경내역

(단위 : 천원)

변경전					변경사업내용	변경요청				변경결정
사업내용	총사업비	시비	구비	자부담		총사업비	시비	구비	자부담	총사업비	시비	구비	자부담
계	37,678	26,375	11,303	-	계	41,392	26,375	11,303	3,714	37,837	26,375	11,303	159
천장석면텍스 교체 및 철거	37,678	26,375	11,303	-	노후CCTV 교체 (전액지원)	14,362	10,053	4,309	-	14,362	10,053	4,309	-
					노후 컴퓨터 교체 (부분지원)	27,030	16,322	6,994	3,714	23,475	16,322	6,994	159

라. 검토결과 : “일부승인”  * 서울시복지재단 타당성검토 완료

- 현장 확인 결과 CCTV 및 컴퓨터가 노후되어 지원의견이나,

- 컴퓨터 교체는 형평성에 맞추어 주요장비단가기준(조달청고시)에 맞추어 조정

※ 시·구비 변동 없음 (자부담액 조정)

붙   임 : 검토결과(성북구-길음).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이광훈		시설지원팀장	오은미		복지정책과장	11/18 엄의식
협조자
시행	복지정책과-12035	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화	02-2133-7355	/전송		/	kwang92@seoul.go.kr	/	대시민공개