투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	천호대로(광나루역) 확장공사 책임감리원
(경유)
제목	업무지시(설계변경 실정보고 승인)

1. 천호수 제2015-550호(2015.11.16)와 관련입니다.

2. 본 전기공사 진행과 관련하여 발생한 실정보고 사항에 대하여 설계변경 승인하오니 설계변경 도서를 조속히 제출하여 주시고 아래 추가 요구 사항 처리에도 만전을 기하여 주시길 바랍니다.

가. 추가 요구 사항

1) 본 실정보고 승인사항에 대하여 향후 준공시 필히 정산 조치

2) 전체분 공사기간 연기조치(준공기한 연기 마감기한 : 2015.12.18일까지)

3) 5차분 준공처리 만전(준공검사조서 제출 마감기한 : 2015.12.21일까지)

- 예비준공검사 실시(2015.11.27일까지)

4) 옥외 변전실 도어(Door) 설치 완료(2015.11.27일까지)

따로붙임 : 실정보고 사항 승인내용 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김두환		환경설비과장	11/18 유병기
협조자
시행	설비부-14487	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8(무교동 96) 프리미어 플레이스 빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8618	/전송	02-3708-8659	/	buckgolje@seoul.go.kr	/	대시민공개