문서번호	설비부-14492
결재일자	2015.11.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		이달영	11/18 박기형
협조
	도시고속도로과장		명경출

『강남순환도시고속도로(민자구간) 건설』

운영설비 실시설계 승인 요청에 대한 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『강남순환도시고속도로 건설 민간투자시설사업』

운영설비 실시설계 승인 요청에 대한 검토 보고

강남순환도로건설(민자구간)에서 운영설비에 대한 실시 설계도서 승인요청이 있어 이를 검토하고 보고드림.

사업개요

○ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 건설공사 (민자사업 BTO, 30년운영)

○ 위    치 : 서울시 관악구 시흥동 ~ 서울 서초구 우면동

○ 규    모 : 6차로, 연장 12.4㎞(터널3개소, 변전실 12개소)

○ 총 사업비 : 856,000백만원(민자 524,200. 건설분담금 268,600,기타 63,200)

○ 공사기간 : 2000. 12. ~ 2016. 5.

○ 시 행 자 : 강남순환도로(주) 대표 조계성(두산건설 등 9개사)

○ 감리/시공 : 선진엔지니어링외 1개사/두산건설외 9개사

추진 사항

○ 2015.11.03. : 강남순환도로(주) 운영설비 실시설계도서 승인요청

운영설비 현황

○ 실시 설계 현황

(단위:억원, 불변금액)

구 분		협 약		실시설계		비 고
		수량	금액	수량	금액
요금징수	ETCS	12	49.2	14	53.3	당초 : 금천 6 / 선암 6 변경 : 금천 8 / 선암 6
	TCS	14		12		당초 : 금천 8 / 선암 6 변경 : 금천 6 / 선암 6
C C T V		122	14.6	151	13.7
비 상 전 화		129	3.3	95	1.6
충격완화시설		27	1.8	18	0.9
축 중 기		4	1.1	4	0.6	이동식
합 계			70.0		70.1

○ 설계변경(수량조정) 사유

- 하이패스 이용자 증가에 따라 영업소 별 ETCS 1개 차로 증설(TCS 차로 감소) 필요.

※ ETCS : Electronic Toll Collection System

- 도로터널 방재시설 설치 지침에 의거 비상전화와 CCTV 수량을 조정함.

- 충격완화 시설은 도로안전시설 설치 및 관리지침 규정에 의거 시설하였으며, 축중기 시설은 교량 진동 및 UP램프와 영업소 진입 길이가 짧아 이동식으로 적용.

감리 검토의견

○ 강남순환도로(민자구간) 운영설비 상세 실시도서의 요금정산설비, 비상전화, CCTV 및 부대설비에 대하여 검토한 결과 적정한 것으로 판단 됨(세부사항 첨부).

조치계획

○ 운영설비 상세설계도서 검토결과 감리 검토의견이 적정한 것으로 판단되어 승인하고자 하며, 고품질의 시공이 적기에 이루어 질 수 있도록 지시하고자 함.

○ 운영설비 실시 설계도서 승인사항을 도로계획과에 제출.

○ 강남순환도로(주)에 진행사항을 통보.

첨부  1. 운영설비 실시 설계 승인요청서  1부.  끝.