보고서(급수공사연기)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
최호림	代양윤선	11/18 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-30831

광진구 상수도공사 감독업무 수행(*************** 급수공사) 중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2015. 11. 18.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 최 호 림

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 광진구 상수도공사(장기계속공사)

연번	주 소	수요가명	공사기간	지시번호	비 고
1	*************	***	2015.10.15.~2015.11.18.	신설-288
2	*************	***	2015.10.21.~2015.11.18.	신설-307
3	**************	***	2015.11.05.~2015.11.18.	신설-350
4	**************	***	2015.11.05.~2015.11.18.	신설-352
5	************	***	2015.11.06.~2015.11.18.	신설-357
6	**************	***	2015.11.06.~2015.11.18.	신설-358
7	**************	***	2015.11.07.~2015.11.18.	신설-360

□ 연기요청사항

연번	주 소	수요가명	연기요청 사유	공사연기 기간	요청인
1	*************	***	신축현장 타공정(벽체내선미설치) 지연으로 연기	2015.11.30.	***
2	*************	***	신축현장 타공정(비계철거) 지연으로 연기	2015.11.30.	***
3	**************	***	신축현장 타공정(비계철거) 지연으로 연기	2015.11.30.	***
4	**************	***	신축현장 타공정(비계철거) 지연으로 연기	2015.11.30.	***
5	************	***	신축현장 타공정(비계철거) 지연으로 연기	2015.11.30.	***
6	**************	***	신축현장 타공정(비계철거) 지연으로 연기	2015.11.30.	***
7	**************	***	신축현장 타공정(비계철거) 지연으로 연기	2015.11.30.	***

□ 검토결과

○ 공사현장 타공정(벽체내선 미설치 및 비계철거) 인한 굴착지연 등으로 수요가측 공사연기 요청에 의하여 공사기간 내 공사가 어려워 공사기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주 소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	*************	***	2015.10.15.~2015.11.18.	2015.10.15.~2015.11.30.
2	*************	***	2015.10.21.~2015.11.18.	2015.10.21.~2015.11.30.
3	**************	***	2015.11.05.~2015.11.18.	2015.11.05.~2015.11.30.
4	**************	***	2015.11.05.~2015.11.18.	2015.11.05.~2015.11.30.
5	************	***	2015.11.06.~2015.11.18.	2015.11.06.~2015.11.30.
6	**************	***	2015.11.06.~2015.11.18.	2015.11.06.~2015.11.30.
7	**************	***	2015.11.07.~2015.11.18.	2015.11.07.~2015.11.30.

□ 귀책사유 : 동부수도사업소

□ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.