문서번호	시설개선과-10041
결재일자	2015.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
황인정		11/18 신동호
협 조
	주무관			지양수

납품기한 연기 보고

(잠실야구장 온수탱크 조달구매)

2015. 11. 18(수)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 신동호 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

납품기한 연기 보고

잠실 야구장 난방급탕설비 교체공사 시행 중, 온수탱크 조달구매 관련하여 아래와 같은 연기사유가 발생하여 납품기한을 연기하고자 함.

□ 구매내역

○ 계약건명 : 잠실야구장 온수탱크 조달구매

○ 납품내용 : Ф1400 × 3500L 6,000L

○ 계 약 자 : 성일기계공업(주) 대표 현 창호

○ 조달금액 : 30,043,330원(수수료 포함)

○ 납품기한 : 2015년 11월 21일

□ 준공기한 연기

○ 연기사유 : 위 공사 진행중, 잠실야구장 선수단 마무리 훈련을 11월 30일 까지 진행함에 따라 온수 사용이 필요하여 납품기한을 연기하고자 함.

※ 관련근거 : 시설개선과-8616(2015.10.8.) 잠실야구장 온수탱크 조달구매

잠실야구장관리본부제2015-17(2015.11.17.) 잠실야구장 기계설비분야 공사 연기 요청의 건

○ 귀책소재 : 체육시설관리사업소

○ 납품기한 변경

- 당초 : 2015년 11월 21일

- 변경 : 2015년 12월 06일

□ 조치의견

위와 같이 납품기한을 연기하여 잠실야구장 난방급탕설비 교체공사에 만전을 기하고자 함.  끝.