투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	9호선연장(3단계) 시스템뷴야 전면책임감리원
(경유)
제목	9호선연장(3단계) 2구간 수전선로 관로굴착 구간 일부변경 실정검토보고 승인

1. 서지9-3시감 제15-37호(2015. 11. 16)호와 관련입니다.

2. 지하철9호선연장(3단계)2구간 송변전공사와 관련하여 감리단에서 실정 보고한 938변전소 수전선로 관로굴착 구간 일부 변경건에 대하여 검토한 바.

3. 도로 굴착보다 본선 터널(690m)을 이용하여 수전선로를 시행함이 타당한 것으로 검토되어 실정보고 건을 승인하오니, 공사시방서 등 관련규정에 의거 시공하고 추후 설계변경시 반영 조치하시기 바랍니다

4. 아울러 도로 굴착작업시 안전요원 배치 등 안전시공 될수 있도록 감리업무 수행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다

( 건설폐기물 처리업체 : 고려개발(주) , 연락처 ************* ). 끝.

따로붙임 : 수전선로 관로굴착 구간 일부변경 실정 검토보고 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김흥정		송변전과장	박동규		도시철도설비부장	전결 11/18 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-11699	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 무교통 96	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7270	/전송	02)772-7308	/	kimkim1117@seoul.g0.kr	/	대시민공개