문서번호	토목부-24292
결재일자	2015.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		명경출	11/18 노우성
협조
	주무관		장종환

교통안전시설물 설치 검토보고

【강남순환 도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.11.

도시기반시설본부

(토목부)

교통안전시설물 설치 검토보고

【강남순환 도시고속도로(8공구) 건설공사】

제2염곡지하차도를 기존 염곡지하차도를 횡단하여 설치함에 따라 기둥 보강공사 시행중 교통처리 및 작업자 안전에 필요한 교통안전시설물 설치에 대한 검토 보고임

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사구간 : 서초구 우면동 ~ 과천시 주암동 ~ 강남구 수서동

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96㎞(교량 2개소, 지하차도 4개소)

❍ 공사기간 : 2001. 7. 3.~2018. 7.31.(9차 `15. 3.10.~12.31.)

❍ 도 급 비 : 229,982백만원(9차 : 25,000백만원)

❍ 시공사/감리사 : 롯데건설㈜ 외1 / ㈜동명기술공단

2		보고내용

❍ 염곡지하차도를 횡단하는 제2염곡지하차도 설치계획에 따라 기존 염곡지하차도의 구조 보강이 필요하여 기둥보강공사 시행 시 교통처리 및 작업자 안전을 위해 교통안전시설물 설치가 필요함

❍ 위치도(평면도)

❍ 주요변경 현황

구 분	규격	단위	당 초	변 경	비 고
P·E 드럼 설치	Ø500×H800	EA	-	350
윙커호스	-	m	-	746
공사안내표지판	900×1,800	EA	-	12
교통안내표지판	900×1,800	EA	-	4
교통안내표지판	1,200×2,400(점멸식)	EA	-	2
P·E방호벽	1,200×600×900	EA	-	42

❍ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증․ 감	비 고
P·E드럼 설치 및 철거	-	5,041	5,041
윙커호스 설치 및 철거	-	895	895
P·E방호벽 설치 및 철거	-	928	928
안내표지판	-	3,750	3,750
직접공사비	-	10,614	10,614
간접공사비	-	2,750	2,750
공급가액	-	13,364	13,364
V.A.T	-	1,336	1,336
총공사비	-	14,700	14,700

3		조치계획

❍ 책임건설사업관리기술자의 교통안전시설물 설치 보고 내용은 타당하므로 승인처리하고

❍ 교통안전시설물 관리대장을 작성, 관리하도록 하고 수량에 대하여 정산처리하도록 하고자 함.

붙 임 : 감리검토의견서 1부.  끝.