서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	(주)한국건설관리공사 책임건설사업관리기술단
(경유)
제목	작업기한 연기요청에 대한 승인 통보(제17차)

1. ㈜한국건설관리공사 1종교량-253호(2015.11.16.)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 제출한 『2015 도로시설물 일상유지보수공사(강남)』의 작업지시(제17차) 연기요청 검토의견서에 대하여 아래와 같이 승인 통보 하오니 공사 추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 작업지시 변경승인

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
17차 작업지시	공사기간	2015. 10. 14 ~ 2015. 11. 20	2015.10.14. ~ 2015. 12. 10	사유: 공사기간중 우천으로 인한 작업기한내 처리 불가
	작업시간	주 간	주 간

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	전재형		강남일반교량팀장	정회평		교량안전과장	11/19 이용심
협조자
시행	교량안전과-5123	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2층 교량안전과	/
전화	02-2133-1975	/전송	02-2133-1429	/	jahe2000@seoul.go.kr	/	대시민공개