투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사 전면책임감리용역 변경 계약의뢰(총괄 4회, 6차 1회)

우리본부에서 시행중인『서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사 전면책임감리용역』에 대하여 다음과 같이 변경 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사 전면책임감리용역

나. 계 약 자 : ㈜유신 외2개사 대표 성낙일

다. 용역개요 : 서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사 전면책임감리

라. 용역기간 : - 총괄 :‘09.11.18 ~ ’16.02.28(변경없음)

- 6 차 :‘15.05.13 ~ ’15.12.31(변경없음)

마. 변경된 계약금액

(단위 : 천원)

구분	계약금액			비고
	당 초	변 경	증,감
총괄(4회)	5,622,489	5,728,689	106,200(증)	용역기간은 변경없음
6차(1회)	863,000	969,200	106,200(증)

바. 증·감 사유 : 지중 전담감리원 비용 추가

사. 예산과목 : 도시기반시설관리, 공사장 안전관리 대책추진, 감리비

첨부 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 변경 설계서 2부(총괄 4회, 6차 1회).

3. 설계변경 합의각서 2부(총괄 4회, 6차 1회). 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	정성환		토목3과장	김정수		도시철도토목부장	11/19 김진팔
협조자	주무관	정삼기		기획예산과장	안순봉		계약2팀장	홍연화
시행	도시철도토목부-14660	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스 9층	/
전화	02-772-7235	/전송	02-772-7306	/	sunghawan@seoul.go.kr	/	대시민공개