투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	실정보고에 따른 회신(철산교보수공사)

1. 시설관리공단 공사감독1처-10498(2015.11.13.)호와 관련입니다

2. 귀공단에서 제출한 “철산교보수공사”의 실정보고에 대해 공단 실정보고내용대로 보수시행하시기 바라며,보수추가 수량에 대해서는 추후 설계변경시 반영하시고,공사장 안전관리,정밀시공,시민통행불편이 최소화될수 있도록 현장관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

실정보고내용	승인내용
**교량하부 보강강판 부식 및 옹벽 표면보호재 손상부 보수를 위한 - 보강강판 도장 158.5㎡, 콘크리트표면보수 281.6㎡	승인

끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	정규용		시설보수과장	11/19 이용재
협조자
시행	시설보수과-4472	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3284-5461	/전송	836-3093	/	eidgyu@souul.go.kr	/	부분공개(5)