급수공사 준공 연기 보고(신설89)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
남상욱	김광운	11/19 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-30941

2015년 성동구 상수도공사(장기계속단가계약) 감독업무 수행중 급수공사 준공기간 연기 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

2015. 11. 19.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 남상욱

공사현황

공사명 : 2015년 성동구 상수도공사(장기계속단가계약)

도급자 : 대평건설(주) 대표 이규억

공사현황

연번	공사종류	위 치	수요가명	공사기간	비고
1	신설 -89	**************	***	‘15.10.30 ~ ’15.11.19

연기요청사유

사유 : 수요가 인입하수관 연결공사로 급수공사 가능시까지 급수공사 연기코자 함.

검토결과

상기와 같은 사유로 상수도 급수공사 준공기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	**************	***	‘15.10.30 ~ ’15.11.19	‘15.10.30 ~ ’15.11.30

귀책사유 : 동부수도사업소장

지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 : 급수공사연기 요청서 1부(별첨).  끝.