의원 요구 자료 제출

시 행	문화정책과-6793
결재일자	2015.11.20.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		문화정책팀장	문화정책과장	문화기획관	문화본부장	결재
남규하		강석	박대우	양현미	11/20 이창학
협 조
	문화시설팀장				이영미
	공예문화팀장				노명옥

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 2315번, 남재경 의원, 도시계획관리위원회)

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

남재경 의원(도시계획관리위원회, 새누리당)

□ 요구번호 : 2315번

9. 국악예술당 / 국악민요전시관 건립 관련 예산(30억) 현황

10. 클래식 콘서트홀 건립 현황

11. 책문화공간 조성 예산(1억)의 구체적 내역

15. 체부동 성결교회 매입 현황

16. 공예박물관 사업 추진 현황

□ 국악예술당 / 민요박물관 건립 관련 예산(30억) 현황

○ 사업개요

- 위    치 : 종로구 와룡동 5-9외 8 필지

- 규    모 : 연면적 3,231㎡, 부지면적 1,523㎡

- 사업기간 : 2009.5. ~2017.6.

- 사업내용 : 국악예술당 및 민요박물관 건립

- 총사업비 : 45,686백만원

○ 2016년 예산(안) : 3,065백만원

- 국악예술당 : ’16.2월 준공 예정으로 2016 회계연도 편성예산 없음

- 민요박물관 : ’16년 3,065백만원 편성

․시설비 : 2,847백만원(공사비 2,598, 설계용역비 226, 공모설계비 23)

․감리비 : 208백만원

․시설부대비 : 10백만원

□ 클래식 콘서트홀 건립 현황

○ 사업개요

- 위    치 : 종로구 세종로 80-1외 3 (세종로공원)

- 대지면적 : 8,855㎡

- 건축규모 : 지하6층/지상5층 (콘서트홀 21,382㎡, 지하주차장 46,288㎡)

콘서트홀		지원시설		기타시설		지하주차장
2,000석		리허설룸, 개인연습실, 악기보관실 등		수익시설, 교육실 등		승용차 기준 1,350면

- 총사업비 : 191,233백만원(추정)

※ ’16년 예산(안) : 설계공모 관리용역 2억, 설계공모 보상비 5억

○ 추진경위

- ’14. 5.~’14.12.	: 서울시 클래식 콘서트홀 건립 타당성조사 용역

- ’15. 6.14.	: 서울시 클래식 콘서트홀 건립 기본계획 수립

- ’15.10.28.	: 서울시 투자심사위원회 심사(원안동의)

○ 향후계획

- ’15. 11.	: 도시계획시설 변경용역 발주

- ’16.	: 중앙투자심사 및 설계공모(도시공간개선단 시행)

- ’17.	: 기본·실시설계

- ’18.~’20.	: 공사시행 및 준공

□ 책문화공간 조성 예산(1억)의 구체적 내역

○ 사업개요

- 위    치 : 중구 청계천로 274(을지로6가 17-48)

- 규    모 : 옥상일부 공간 시범사업 조성 후, 사업 확대 검토

- 사업기간 : 2015년~2017년

- 사업내용 : 미래유산인 평화시장에 위치한 헌책방거리와 연계하여 책문화 확산 공간 시범 조성

○ 2016년 예산(안) : 86백만원

- 예산내역 : 평화시장 책문화공간 조성 설계용역비 86백만원

□ 체부동 성결교회 매입 추진현황

○ 사업개요

- 위    치 : 종로구 자하문로1나길 3-2

- 규    모 : 부지 467㎡, 연면적 454㎡

- 사업기간 : 2016.1.~2017.3.

- 사업내용 : 체부동 성결교회 매입 및 문화공간 조성

- 총사업비 : 3,858백만원(매입비 2,800, 대수선공사비 등 1,058)

○ 매입 추진현황

- ’14. 7.	: 매입 요청(교회  →  한옥조성과)

- ’14. 8.~11.	: 매입 검토(한옥조성과)

- ’15. 2.	: 소유자 면담(문화정책과)

※ 지역주민 문화공간으로 활용 희망, 그 전제하에 감정가 매각 수용

- ’15. 4.	: 매입계획 수립(문화정책과)

- ’15. 5.	: 매입 공유재산 심의(결과 : 적정)

- ’15. 7.~9.	: 정밀안전진단 용역 실시

- ’15. 8.	: 보존 및 활용 투자심사(결과 : 적정)

○ 향후계획

- ’15.11.~12.	: 감정평가 시행, 보존 및 활용 예산편성

- ’16. 1.	: 체부동 성결교회 매입

□ 공예문화박물관 사업 추진 현황

○ 사업개요

- 목    적 : 공예의 가치제고 및 생활화를 위해 공예연구․교육․체험․전시․제작․판매 등이 함께 이루어지는 공예문화 허브공간 조성

- 사업근거 : 공예문화산업 진흥법 제3조, 제11조

- 위    치 : 종로구 율곡로3길 4(안국동 175-2, 175-102) 풍문여고 부지

- 규    모 : 연면적 9,958㎡, 지하1층/지상4층(부지면적 : 12,766㎡)

- 사업기간 : 2014. 9월 ~ 2018. 9월

- 사업내용 : 전시실, 수장고, 공예연구실, 체험관, 교육장, 레지던시, 판매장, 프리마켓 등

○ 추진경위

- ’14.5. ~ 8.	: 공예문화박물관 건립 기본계획 및 타당성조사용역

- ’14. 8.	: 공유재산심의

- ’14. 9.	: 서울공예문화박물관 건립계획 수립

- ’14.10.	: 투자심사

- ’14.12. 1	: 시의회 공유재산관리계획

- ’15. 5.	: 풍문여고 매매계약 체결

- ’15. 9.14	: 소장품 수집․전시 및 운영방안 연구용역 착수

○ 향후계획

- ’15. 9. ~ ’16. 1.	: 소장품 수집·전시 및 운영방안 연구용역

- ’16. 1. ~ 12.	: 설계공모, 기본설계 및 실시설계

- ’17. 2.	: 소유권 이전 및 풍문여고 이전

- ’17. 3. ~ 6.	: 문화재 시굴조사(운동장 지하)

- ’17. 3. ~ ’18. 9.	: 공예문화박물관으로 리모델링 및 개관.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	문화본부 (문화정책과)	담당사무관	강 석 이 영 미 노 명 옥
	☎ 2133-2517	담당자	남 규 하 이 지 나 박 기 철
	작 성 일 : 2015. 11.

이곳에 본문을 입력하세요