투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(제1처리장 최초침전지 보수공사)

1. 우리센터에서 시행하고 있는“제1처리장 최초침전지 보수공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 제1처리장 최초침전지 유출수로 보수공사

나. 공사기간 : 2015. 5. 28 ~ 2015. 11. 23

다. 도 급 자 : ㈜미래실내건축  대표 문두태

라. 변경사유 : #1처리장 3-3지 부분시공 ⇒ 전체시공,

시공수량 증․감, 신규공종 추가

마. 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 운영관리,

난지물재생센터 공통분야 유지보수, 시설비및부대비, 시설비

바. 공 사 비

구 분	당초금액	변경금액	증․감	비 고
총공사비	681,356,070	866,800,000	증185,443,930
도 급 비	681,356,070	866,800,000	증185,443,930

첨부  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경서 1부.

3. 관련도면 1부.  끝.

주무관	김민호		주무관	강희석		시설팀장	김재봉		물재생과장	김일운
난지물재생센터소장	11/20 가길현
협조자	주무관	지두연		관리과장	이재성
시행	물재생과-4852	(		)	접수		(		)
우	10542	경기 고양시 덕양구 대덕로426(현천동)	/
전화	02-300-8558	/전송	02-300-8580	/		/	대시민공개