문서번호	물순환정책과-5121
결재일자	2015.11.20.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	수질수생태팀장	물순환정책과장
김근수	정미선	11/20 최진석
협 조	하천관리과장		代손경철
	하천계획팀장		심형보

『생태하천사업 성과평가 및 관리전략수립용역』

용역사업 설계변경 검토 보고

2015. 11.

물순환안전국

[물순환정책과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『생태하천사업 성과평가 및 관리전략수립용역』

용역사업 설계변경 검토보고

홍제천 상류 자연성 회복 및 경관 복원을 위한 타당성 조사용역을 현재 시행중에 있는『생태하천사업 성과평가 및 관리전략수립용역』사업에 포함하여 시행하기 위해 용역설계 변경을 추진하고자 함

※ 추진근거: 타당성 조사용역 추진계획(국장방침 하천관리과-4139호 ‘15.11.18호)

1		용역개요

○ 용 역 명 :생태하천사업 성과평가 및 관리전략수립용역

○ 계 약 자 :동부엔지니어링(주), 서울시립대학 산학협력단

○ 용역기간 : '15.9.22 ~ '16.12.31

○ 계약금액 : 782백만원(‘15년 예산: 500백만원, ’16년:400백만원)

○ 과업내용

- 생태하천 복원사업(19개하천, 연장 65.35km)성과평가 분석

- 생태하천조성사업 모형개발 및 시범사업 대상지 선정과 하천관리전략수립

2		변경내용

○ 홍제천 상류 자연성 회복 및 경관 복원 타당성조사 과업을 본 용역      사업에 포함하여 변경계약 후 추가 과업 시행

- 과업위치 : 세검정삼거리~홍제천 기점~발원지(2.2km, 60,000㎡)

- 과업내용 : 하천변 물리적 현황 등 조사 및 인문·역사 등 스토리텔링 자원조사, 도심하천 경관복원사례 조사 등, 홍제천 상류 경관복원 타당성 검토

- 타당성조사 용역기간 : 2015.11 ~ 2016. 2(3개월)

3		설계변경 계획

○ 설계변경 내역                                        (단위 : 원)

항 목	당 초	변 경	증·감	비 고
순용역비	710,909,091	788,309,091	증77,400,000
부 가 세	71,090,909	78,830,909	증 7,740,000
계약금액	782,000,000	867,140,000	증85,140,000

○ 변경사유

- 시장님 요청사항(‘15.9.28)인 “홍제천 자연성 회복 및 경관복원” 타당성 조사를 시급히 추진하고자 함으로,

- 본 용역사업의 예산잔액을 활용하여 “홍제천 자연성 회복 및 경관복원 타당성 조사용역”을 시행중인 본 용역에 포함 시행하고, 추가과업 내역은  2016.2월말 까지 완료 하고자 함

4		조치계획

○ 용역계약 업체와 협의하여 “홍제천 상류 자연성 회복 및 경관 복원 타당성조사 용역” 인 추가과업에 대해 용역반영과 계약금액 변경에 대해 협의 후 시행

○ 추가용역에 대한 업무 관리 감독은 “하천관리과”에서 시행토록 하여 홍제천 자연성 회복 및 경관 복원 타당성조사 용역에 철저를 기하고자 함

붙임 1. 타당성 조사용역 추진계획  1부.

2. 당초,추가용역 내역 및 과업내용서 1부.  끝.