문서번호	건축부-13162
결재일자	2015.11.20.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
지방시설사무관대우	의료시설과장	건축부장		시설국장
신현성	김충범	안재혁		11/20 代김종근
협 조
	주무관		이광백

『세운상가군 활성화를 위한 공공공간 구성』

설 계 추 진  사 항 보 고

2015. 11

도시기반시설본부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『세운상가군 활성화를 위한 공공공간 구성』

설  계  추  진  사  항  보  고

『세운상가군 활성화를 위한 공공공간 구성』사업과 관련하여  기본설계 미완료 상태로 실시 설계관련 진행 사항을 보고 드림

□ 추진사항

○ 2015. 11. 6 세운상가 공공공간 구성사업 TF팀 운영계획수립

○ 2015. 11. 9 1차 TF팀 회의

○ 2015. 11.16 기본설계서 제출 요구 (도시기반시설본부→역사

도심재생과)

□ 기본설계 미진 사항에 대한 추진 내용

구분	미 진 내 용	추 진 내 용	비고
구조	기존건물 구조부분 보강방법 미확정	- 전단보강 부분은 탄소패널보강 - 휨부분은 강선과 패널 보강으로 설계되었고 건물에대한 안전사항 추가 검토 완료됨	구조전문가 자문 예정
교량	교량분야 설계 미완료	- 교량분야 설계 작성중으로 2015. 11. 20까지 작성예정
관리주체	협의대상인 관리주체 미확정	- 건축부 - 12873(2015.11.13.)호로 역사도심재생과에 관리주체 결정 요청 → 촉구 예정
예산	을지로 지하상가 출입구 확대로 인한 예산 증액요청	- 건축부 - 12873(2015.11.13.)호로 역사도심재생과에 예산증액 가능 여부 요청중

□ 설계 진행 사항

일 자	설계 진행 사항	비고
2015. 11. 16	- 건축 내역서 작성 진행 교량 기술심의시 변경된 내용 설계반영 구조 초록띠 공원 구조물 구조도면 작성 설비 소방도면 작성중 전기 조명설계 진행 조경 시설물상세도 작성 토목 공사계획평면도 작성
2015. 11. 17	- 건축 우수계획도 및 정화조 도면 작성 교량 거더단면도, 강교일반도 작성 구조 기초 보강평면도 작성 설비 소방도면 작성완료 전기 건축평면에 따라 전기도면 정리 등 조경 테이블 가든 상세도 작성 토목 공원 굴착계획도 작성
2015. 11. 18	건축 상세도 작성 교량 기초 일반도 상세도 작성 구조 건축도면 수정사항 반영 설비 1차도서 완료 전기 기계설비 동력 확인 및 셀단위 도면 작성 조경 공사비 산정 토목 포장계획도 작성

○ 2015. 11.19  총괄책임건축사 대표 김택빈 구두 협의

2015. 11. 20일까지  기본설계서 완료 제출

현재 내역서 작성 진행 중

□ 향후계획

○ 2015. 11. 24 실시설계 추진을 위한 TF회의를 진행하고

○ 설계서를 확인하고 심사부서 제출 자료 준비 등 점검

- 2015. 11. 20  기본설계서 완료예정임(이스케이프 건축사사무소)

붙 임 : 설계추진 일보 및 구조 보강 도면 각1부.  끝