문서번호	방재시설부-15569
결재일자	2015.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
김상용		윤방식	11/20 임춘근
협조

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

건설폐기물 추가계약 검토 보고

2015. 11

도시기반시설본부

(방재시설부)

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

건설폐기물 추가계약 검토 보고

「서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업」중 발생된 폐기물(혼합폐기물, 소각폐기물) 수량이 당초 계약물량을 초과하여 발생되어 추가 변경계약요청에 대한 실정보고 임.

관련근거

○ 도화(서남)2015-368호(‘15.11.12)『실정보고(건설폐기물 추가 계약요청)』

공사개요

○ 시설공사

- 위    치 : 서울시 강서구 양천로 201(마곡동, 서남물재생센터)

- 규    모 : 고도처리시설개량 115만톤/일, 시설현대화 36만톤/일, 기존시설존치 12만톤/일

- 사업기간 : 2009. 11. 09 ∼ 2016. 02. 28

- 계약방법 : 설계·시공 일괄입찰(T/K)

- 총도급비 : 312,237백만원

- 시공/감리 : 대림산업(주)외 5개사 / (주)도화엔지니어링, (주)유신

○ 폐기물처리 용역

- 규    모 : 폐기물 운반 및 처리(폐콘크리트, 폐아스콘, 혼합, 소각, 재활용폐기물)

- 사업기간 : 2009. 12. 02 ∼ 2016. 02. 28

- 도 급 자 : 우광개발(주)

실정보고 내용

○ 관련규정

- 입찰안내서 제3장 계약3.3 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 일괄입찰 공사계약 특수조건 제49조(폐기물 처리)

③ 발주기관은 폐기물처리업체에게 당해 폐기물 처리업무를 별도 발주할 경우 이에 소요되는 비용을 계약상대자의 계약금액에서 감액한다.

감액비용산정은 계약상대자가 제시한 건설폐기물 처리물량에 발주기관에서 발주한 폐기물처리용역의 평균 계약단가를 곱하여 산정한다.

○ 폐기물 계약현황(우광개발)

구 분	수량(ton)	금액(천원)	비고
폐콘크리트	219,259.58	2,027,274
폐아스콘	10,291.47	96,791
혼합폐기물	89.50	2,896
소각폐기물	260.64	35,092	폐합성수지
기타(테니스장등)	1식	12,003

○ 변경 사유

- 공사시행 과정에서 혼합폐기물 및 폐합성수지 발생물량이 당초 계약물량을 초과하여 추가계약이 필요하며,

- 혼합폐기물의 기존단가에 대하여 폐기물처리업체에서 수도권매립지 처리단가 인상 등을 사유로 단가 조정 요청이 있어, 입찰안내서 규정에 따라 발주기관에서 발주한 폐기물처리용역의 평균 계약단가로 반영코자 함.

○ 변경 요청 사항

- 폐기물 추가 발생량

구 분	발생내용	수량	비고
혼합폐기물	폐거푸집+부속품, 폐콘+폐토석 등	증)315톤
폐합성수지	거푸집디콘, 청탑지, 각종안전용품 등	증)71톤

- 혼합폐기물 적용단가(서울시 발주 건설공사 혼합폐기물 계약단가)

구분	재사용플라자	경춘선폐선부지공원화	구로1동 어린이집	적용단가 (평균)	비고
합계	36,366원/톤	37,102원/톤	45,674원/톤	39,690원/톤
운반	5,921원/톤	8,247원/톤	10,882원/톤	8,330원/톤
처리	30,445원/톤	28,855원/톤	34,792원/톤	31,360원/톤

○ 공사비 검토(우광개발)

품목	단위	구분	수량	단가	금액(천원)	증감(천원)	비고
폐콘크리트	톤	당초	219,260	9,246	2,027,274	-
		변경	219,260	9,246	2,027,274
폐아스콘	톤	당초	10,291	9,405	96,791	-
		변경	10,291	9,405	96,791
혼합폐기물	톤	당초	90	32,363	2,896
		변경	90	32,363	2,896
	톤	당초
		변경	315	39,690	12,504	증)12,504	변경단가
소각폐기물 (폐합성수지)	톤	당초	261	134,638	35,092
		변경	332	134,638	44,651	증)9,559	기존단가
기 타 (테니스장 등)	톤	당초	1		12,003
		변경	1		12,003
합계 (VAT포함)		당초			2,392,500		단수조정
		변경			2,416,800	증)24,300	단수조정

검토 및 조치계획

○ 건설폐기물처리는 관련법령(분리발주)에 의거 발주기관에서 폐기물처리업체와 별도 계약한 사항으로, 공사과정에서 추가 발생된 폐기물에 대하여 변경계약하여 현장내 발생 폐기물의 원활한 처리를 하고자 함.

○ 입찰안내서 3장 제49조(폐기물처리)에 의거 최종 폐기물처리 비용은 공사준공 정산 시 도급비에서 감액 반영하며,

○ 폐기물처리용역 변경 실정보고에 대하여는 책임감리원의 검토의견이 적절하다고 판단됨으로 감리단 보고내용과 같이 실정보고 사항을 승인코자 함.

붙임 : 책임감리원 검토의견서 1부. 끝.